투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(총차 및 5차) 계약 의뢰 [강남순환도시고속도로(8공구) 구룡지하차도 전기공사]

1. 설비부-11521(2019.07.29.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행중인「강남순환도시고속도로(8공구) 구룡지하차도 전기공사」에 대한 설계변경(총차 9회 및 5차 1회) 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명:「강남순환도시고속도로(8공구) 구룡지하차도 전기공사」

나. 도 급 비: (총차) 1,286백만원, (5차) 70백만원

다. 도 급 사: ㈜진영전력

라. 변경사유 : 실정보고 사항 반영

마. 설계변경 내용

구 분	계 약 금 액(원)			계 약 기 간		비고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
총 차	1,286,000,000	1,305,338,360	증)19,338,360	2012.08.02.~ 2022.12.31.	변경없음
5 차	69,649,240	88,987,600	증)19,338,360	2019.04.22.~ 2020.12.31.	변경없음

바. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 도시고속도로망확충, 강남순환도시고속도로건설, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 검토 보고서 및 감리단 공문 1부.

2. 설계변경 내역서(총차 및 5차) 1부.

3. 합의각서(총차 및 5차) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	07/29 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-11533	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)