문서번호	건축부-13122
결재일자	2019.7.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
이랑		代정호기	07/30 代유현수
협조	장애인재가복지팀장		代정항교
	주무관		조윤제

「시립북부장애인복지관 증축공사」

예비준공검사 시행계획

2019. 7.

도시기반시설본부

[건 축 부]

「시립북부장애인복지관 증축공사」

예비준공검사 시행계획

「시립북부장애인복지관 증축공사」관련, 준공 전 예비준공 검사를 실시하여 준공 및 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

1		공사개요

○ 위    치 : 노원구 상계동 771

○ 규모/용도 : 기존 지하1층 지상 2층, 상부 3층 증축/노유자시설

○ 공사기간 : 2018. 5 ~ 2019. 8

○ 도 급 액 :************

○ 시공사/감리자 : 유호산업개발 외 2 / 대한민국 상이군경회

2		추진경위

○ 2018.01.29. : 설계변경(안) 제출(장애인자립지원과→건축부)

○ 2018.05.15. : 공사계약

○ 2018.05.28. : 공사착공

○ 2018.06.22. : 복지관 증축 설계변경 요청(장애인자립지원과→건축부)

○ 2018.07.26. : 공사관계자 실무회의 개최

○ 2018.12.27. : 1차 설계변경

○ 2019.04.16. : 공사기간 연장(49일)

○ 2019.07.03. : 공사기간 연장(42일)

○ 2019.07.26. : 예비준공검사 계획 보고(건설사업관리단)

3		예비준공 검사

관련문서

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조

○ 건축부-1247(2018.1.26.)호 “공공건축물 건립공사 예비준공검사 시행계획”

○ 상이군경시설2019-B-095(2019.7.26.) “예비준공검사 계획 보고”

예비준공검사 개요

******************************

**************************

*********

*************************************

***********************

**************

***	****	****	****	****
*	***	****	********	**
*	***	****	*******	**

○ 입 회 자

- 시립북부장애인복지관(운영사)

- 건설사업관리기술자(상주 및 기술지원 감리원)

- 시공사 현장대리인

○ 준공검사 내용

- 공사 내용 중 미비한 사항의 사전 보완

- 변경 설계도서에 의거 준공검사에 준하여 시행

- 공사 품질확보 및 하자 예방 사전점검

4		행정사항

○ 점검 지적사항 통보 및 보완지시

*********************

**************************************

*********************

***********************************************************************************

5		향후계획

○ 2019. 8. 6 : 지적사항 보완조치 완료

○ 2019. 8.22 : 준공검사 접수

붙 임 1. 예비준공검사 계획 보고 1부.

2. 예비준공검사 점검자 참석 명단 1부.

3. 예비준공검사 조서 1부.

4. 지적사항 조치결과 보고서 1부.  끝.