문서번호	공원여가과-2070
결재일자	2019.7.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	공원여가과장	공원부장
박지해	代오승민	07/30 김인숙

잠실한강공원 론볼장 정비사업 등 준공기한 연장 추진계획

2019.  7.

한강사업본부

(공원여가과)

잠실한강공원 론볼장 정비사업 등 준공기한 연장 추진계획

우리본부에서 추진 중인 ｢잠실한강공원 론볼장 정비사업｣과 관련하여 현장여건 변화 등을 고려하여 아래와 같이 준공기한을 연장하고자 함

□ 공사개요

공사명	공사기간	총공사비	도급업체
잠실한강공원 론볼장 정비사업	2019.5.16. ~ 2019.7.31.	************ *************** **************	**************
잠실한강공원 론볼장 정비사업 건설폐기물 처리용역	2019.5.29. ~ 2019.7.31.	***********	************ ************* *****

□ 준공기한 연장사항

○ 공사기간

공사명	공사기간(당초)	공사기간(변경)	총공사비
잠실한강공원 론볼장 정비사업	2019.5.16. ~ 2019.7.31.	2019.5.16. ~ 2019.8.10.	변동없음
잠실한강공원 론볼장 정비사업 건설폐기물 처리용역	2019.5.29. ~ 2019.7.31.	2019.5.29. ~ 2019.8.10.	변동없음

○ 연장사유

- 론볼경기장 공인증(대한장애인론볼협희) 절차를 위한 공기 연장기간 중 10일 이상(7.30.현재, 기상청) 우천에 의한 작업 지연으로 추가 보완사항 조치에 따른 기간연장 필요

□ 귀책소재 및 지체상금 부과

○ 귀책소재 : 한강사업본부

○ 지체상금 : 미부과

□ 검토의견

○ 상기와 같이 잠실한강공원 론볼장 정비사업 등 준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 각1부.

2. 합의각서 각1부.  끝.