문서번호	사회적경제담당관-10283
결재일자	2019.7.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	사회적경제정책팀장	사회적경제담당관
박미진	김미경	07/30 조완석

「소셜벤처허브센터 인테리어공사(건축,기계)」

실정보고(설계변경) 검토보고

2019. 7.

사회적경제담당관

「소셜벤처허브센터 인테리어공사(건축,기계)」

실정보고(설계변경) 검토보고

「소셜벤처허브센터 인테리어공사(건축,기계)」시행중 공사현장 여건변동으로 인한 공사실정 보고사항에 대해 검토 보고 드림

□ 관련근거

○ 소셜벤처허브센터 인테리어공사(건축, 기계) 실정보고(MIST1907-005호)

○ 소셜벤처허브센터 인테리어공사(건축, 기계) 디자인감리 검토의견서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 소셜벤처허브센터 인테리어공사(건축, 기계)

○ 계약기간 : 2019.6.13.~2019.8.31.

○ 공사내용 : 소셜벤처허브센터 가설, 바닥 등 건축 및 배관 등 기계 공사

○ 계약금액 : 금161,261,800원

□ 검토내용

○ 변경개요(총공사비)

변경사항	당 초	변 경	비 고
계약금액	161,261,800원	186,499,186원	증25,237,386원

○ 주요변경사항(순공사비)

(단위 : 원)

구 분	주요변경내용	변경사유	개략공사비(순공사비)
			당초	변경	증감
배관·배선 공사	난연CD전선관(16㎜) 증100m 스위치박스(사각) 증10개 신호케이블(0.65*4C) 증100m	현장여건 및 안전 고려 노출천정 배관 및 배선 정리	0	589,039	589,039
천정텍스 보수공사	아미텍스(600*300*12T)증270장	타 공종 시공을 위하여 철거한 텍스 원상복구(재설치)	0	852,017	852,017
공조 공사	노출디퓨져(210/150A) 증2개 노출디퓨져(185/125A)증12개 후렉시볼(150A) 증200M 스파이럴덕트(125A)증16M 스파이럴덕트(150A) 증32M 스파이럴덕트(200A) 증8M 스파이럴덕트(250A) 증8M 엘보(45,150A) 증20개 엘보(90,125A) 증18개 엘보(90,150A) 증1개 엘보(90,200A) 증1개 엘보(90,250A) 증12개 A/L테이프(50*100) 증3개 반도(SUS,150A) 증50개 행거반도(125A) 증10개 행거반도(150A) 증20개 행거반도(200A) 증6개 행거반도(250A) 증6개 전산볼트(3*8) 증20개 스트롱앙카(3*8) 증100개 TEE(150A) 증5개 TEE(150A*125A) 증4개 TEE(150A*200A) 증1개 TEE(150A*250A) 증1개 TEE(200A) 증2개 TEE(300A*150A) 증2개 시리코(F190,DSB) 증1개 캡(150A) 증2개 레듀샤(150A*250A) 증4개 각형관디휴자(125A) 증6개	당초 신규(추가)설치 계획이였으나 현장여건상 추가설치가 불가하여 기존 공조설비를 활용하는 것으로 설계변경하여 시공 기존 공조설비는 천정텍스 내 시공으로 알루미늄 후렉시볼 처짐에 따른 덕트 교체 등 노출천정인 현장여건에 맞게 시공	0	7,841,043	7,841,043
냉난방이설 공사	냉매배관공사 증10식 드레인공사 증10식 실내기 및 제어선 설치 각 증10식	현장여건(노출천정) 및 공간확장을 위하여 기 설치된 실내기를 전기 및 타 공종 배관 등 기존시설물과 높이를 맞추어 이설	0	7,300,000	7,300,000
경 비	건강보험료 증158,604원 연금보험료 증220,965원 노인장기요양보험료 증13,499원 안전관리비 증70,948원 산재 및 고용보험료 증591,067원	순공사비 증가에 따른 보험료 및 안전관리비 산정	17,292,157	19,407,766	2,115,609

□ 감리자의견

○ 그간 현장감리 및 시공업체 실정보고에 따른 현장검토결과 변경적용하여 시공함이 타당하다고 판단

□ 예산현황 및 시설비 가용여부 검토

○ 설계변경으로 인한 공사비 등 증가부분에 대해 본 사업의 시설비 집행잔액(낙찰차액 등) 56백만원 활용 예정

○ 시설비 예산 및 집행(예정)현황

(단위 : 원)

구 분	내역	예산액	계약금액	집행잔액 (낙찰차액 등)
일반 회계 시설비	설계용역	400,000,000	18,930,000	56,210,140
	건축·기계		161,261,800
	전기		62,750,610
	소방		48,274,210
	정보통신		1,020,270
	관급자재(건축)		15,870,430
	관급자재(기계)		35,682,540
	소 계		343,789,860
사회 투자 기금 시설비	정보통신	21,350,000	6,729,730	376,880
	관급자재(건축)		14,243,390
	소 계		20,973,120
합 계				56,587,020

※ 소셜벤처허브센터 인테리어공사(전기) 설계변경(증12백만원) 예정(’19.7.22. 기 보고)

□ 조치계획

○ 시공업체 실정보고 및 디자인감리자의견에 대한 검토결과 현장여건 반영 및 사업목적에 부합한 시설물 조성을 위해 디자인감리자 의견과 같이 시공토록하고 추후 설계변경하고자 함

□ 향후일정

○ ’19.7. : 시공업체 실정보고 검토결과 회신

○ ’19.8. : 변경계약 의뢰(→재무과)

따로붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 디자인감리 검토의견서 1부.  끝.