문서번호	건축부-9894
결재일자	2018.7.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
서경식		차무흥	07/16 임인구
협 조	주무관			이강욱
	주무관			백남진
	주무관			정영미
	주무관			조문석
	주무관			송옥의

『시민생활사박물관 리모델링(증축) 공사』

『구 북부법조단지 환경개선공사』

건설사업관리용역 계약변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서명	협의내용	협의결과
	설비부	기계·전기·통신분야
	방재시설부	조경분야

2018. 7.

도시기반시설본부(건축부)

『시민생활사박물관 리모델링(증축) 공사』『구 북부법조단지 환경개선공사』

건설사업관리용역 계약변경 검토 보고

「시민생활사박물관 리모델링(증축) 공사」및「구 북부법조단지 환경개선공사」관련, 건설사업관리용역(총차,1차) 계약변경 요청이 있어 검토 보고함

1		용 역 개 요

용 역 명 : 시민생활사박물관 리모델링공사 건설사업관리용역(감독권한대행)

계 약 자 : (주)경호엔지니어링 외 1개사

계약금액 : ************************************

차수별 계약현황

구분	계약금액(원)	용역 기간	비고
총차	*************	***********************	516일
1차	***********	***********************	316일
2차	***********	***********************	200일

2		추 진 경 위

`15. 8. 31. : 가칭 시민생활사박물관(박물관MALL) 조성 건립계획

`15. 8. 31. : 설계 및 공사의뢰(박물관과 → 건축부)

`16. 4. 21. ~ 11.31. : 설계용역

`17. 8. 25. : 공용건축물 협의 완료

`17. 10. 16. : 건설사업관리용역 착수

`17. 10. 20. : 시민생활사박물관 리모델링(증축) 공사 착공

`18. 3. 21. : 구 북부법조단지 환경개선공사 착공

3		계약변경 내용

공사 계약 기간

- 건 축 부

· 시민생활사박물관 리모데링(증축) 공사: ***********************

· 구 북부법조단지 환경개선공사: **********************

- 설 비 부

· 시민생활사박물관 리모델링(증축) 기계공사: *********************

· 시민생활사박물관 리모델링 전기공사: *********************

· 시민생활사박물관 리모델링 통신공사: **********************

변경 사유

- **********************************************************

변경 세부 내용

- 건설사업관리기술자 배치 재조정

구 분	당 초	변 경	투입인일
책임기술자(건축)	*********************	*********************	*****
상주기술자(기계)	*********************	*********************	****
상주기술자(전기)	*********************	*********************	****
상주기술자(토목)	********************* *********************	********************* *********************	****
상주기술자(건축1)	*********************	*********************	*****
상주기술자(건축2)	*********************	*********************	****
상주기술자(조경)	*********************	*********************	****
상주기술자(통신)	*********************	*********************	****

- 용역 기간 변경

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	비 고
총차	기간	*********************	*********************	*****
	금액	**************	**************	**********
1차	기간	*********************	*********************	*****
	금액	************	************	**********
2차 (예정)	기간	*********************	*	**
	금액	************	************	**********

※ ******************************************************************************

4		처리의견

공사의 적정품질 확보 및 원활한 사업수행을 위해 기술자를 배치·조정하는 사항으로,

건설사업관리자의 요청에 따라, *******************************************하고, *****************************************하여 계약변경 시행하고자 함.

붙임: 건설사업관리용역 계약변경 요청서 1부.  끝.