문서번호	기전설비과-2504
결재일자	2019.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	기획예산과장		생산부장
이기상	조성태	박재희		03/18 유병기
협 조
	재무회계과장		김분숙
	시설과장		송병욱

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

「국사봉배수지 건설공사」

전기분야 관급자재 구매계획

2019. 3.

생  산  부

(기전설비과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	국사봉배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「국사봉배수지 건설공사」

전기분야 관급자재 구매계획

아리수 원활한 공급을 위한 국사봉배수지 건설공사 전기분야에 소요되는 관급자재를 적기에 구매하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 추진배경

◯ 근    거 : 2030 서울 수도정비기본계획(2013.12.)

◯ 목    적 : 배수지 적정 체류시간(6.1h→12h) 확보를 통한 무단수 급수 체계를 구축하여 아리수의 안정적 공급 및 시민 불편 해소

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 국사봉배수지 건설 전기공사(기발주)

◯ 기    간 : ’18. 4. 2. ~ ’19. 7. 17.(장기계속공사)

◯ 사 업 비 : 545백만원(전기공사 225백만원, 관급자재 320백만원)

◯ 사업내용 : 전기공사(배관배선공사 1식, 접지공사 1식, 조명공사 1식)

관급자재(감시제어 1식, 계측기기 1식, CCTV 1식, 조명 1식)

□ 추진일정(2019년)

구 분	물 량	3월			4월			5월			6월			7월			비 고
1. 전기 배관배선공사	13.8
2. 계측제어 배관배선공사	16.6
3. 접지 및 피뢰공사	3.4
4. 옥외 보안등 공사	3.0
5. 공원등 공사	4.0
6. 전등 및 전열설비공사	5.6
7. 전기방식 공사	53.6
공사 진행	100.0

Ⅱ		관급자재 구매계획

□ 구매 개요

◯ 구매방향 : 수도법 제14조에 의거 위생안전기준 인증을 획득한 제품 구매

◯ 소요예산 : 320백만원

◯ 구매예산 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설및부대비, 시설비

◯ 관급내역

구 분	계장제어설비	유량계	CCTV	조명설비
수 량	TM/TC 1면 프로그램 1식 수질계 1개	유량계 2개 (계측설비)	카메라 4개 서 버 2개 모니터 2개	40W 14개 65W 4개 80W 19개
금 액	180백만원	45백만원	60백만원	35백만원
방 법	지명경쟁	조달구매(3자단가)	조달구매(3자단가)	조달구매(3자단가)

Ⅲ		세부 구매계획

□ 건   명 : 국사봉배수지 자동제어설비 제작구매 설치

◯ 구매방법 : 지명경쟁입찰

◯ 구매방향

- 배수지 자동제어설비는 아리수 공급에 영향이 큰 핵심설비로 사업의 특수성을 감안하여 정수시설 등 수처리분야 자동제어설비 구축 경험이 풍부하고 고장 및 테러 등 긴급정비가 필요할 때 신속한 조치가 가능한 업체를「한국계측제어공업 협동조합」에서 추천받아 지명경쟁 입찰하고자 함

◯ 소요예산 : 180백만원

◯ 관련근거 : 지방계약법 제9조, 동법 시행령 제22조, 동법 시행규칙 제27조

◯ 추진일정

- 2019. 3. : 계약심사

- 2019. 4. : 구매발주 및 계약체결

- 2019. 5. : 물품납품 및 검사검수

□ 건   명 : 국사봉배수지 계측설비 구매

◯ 구매방법 : 조달구매(제3자단가)

◯ 소요예산 : 45백만원

◯ 관련근거 : 조달사업법 제5조의2 및 동법 시행령 제9조의3(계약체결의 요청)

서울시 계약심사 업무처리 규칙 제5조의2(특정제품 선정심사)

◯ 추진일정

- 2019. 3. : 특정제품 선정심의

- 2019. 4. : 구매발주 및 계약체결

- 2019. 5. : 물품납품 및 검사검수

□ 건   명 : 국사봉배수지 CCTV 구매

◯ 구매방법 : 조달구매(제3자단가)

◯ 소요예산 : 60백만원

◯ 관련근거 : 조달사업법 제5조의2 및 동법 시행령 제9조의3(계약체결의 요청)

서울시 계약심사 업무처리 규칙 제5조의2(특정제품 선정심사)

◯ 추진일정

- 2019. 3. : 특정제품 선정심의

- 2019. 4. : 구매발주 및 계약체결

- 2019. 5. : 물품납품 및 검사검수

□ 건   명 : 국사봉배수지 조명설비 구매

◯ 구매방법 : 조달구매(제3자단가)

◯ 소요예산 : 35백만원

◯ 관련근거 : 조달사업법 제5조의2 및 동법 시행령 제9조의3(계약체결의 요청)

◯ 추진일정

- 2019. 4. : 구매발주 및 계약체결

- 2019. 5. : 물품납품 및 검사검수

붙임 : 관련 법규 1부.  끝.