문서번호	가족담당관-15628
결재일자	2019.7.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		아동복지팀장	가족담당관
최문선		유규용	07/30 김복재
협조

(現)도티병원 정밀안전진단 용역 변경 계획

2019.  7.

여성가족정책실

(가족담당관)

******* 정밀안전진단 용역 변경 계획

**********************************본관 건물   부동침하 발생 등에 따른 대책 마련을 위해 정밀안전진단 및 내진   성능평가 용역 기간 연장을 승인하는 계획을 보고 드림

□ 시설물 현황

*******************************

*******************************

**************************

*************************************

************************************

○ 준공연도 : 1982년

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : ******************************

정밀안전진단 및 내진성능평가 용역

○ 과업대상 :********************

○ 용역기간 : 착수일로부터 60일

○ 발주방법 : 수의계약

○ 주요과업 내용

- 지질조사

- 건물실측 및 도면작성

- 대상 건축물에 대한 안전성 평가 등 현장조사(정밀안전진단에 준함)

- 내진성능평가

- 안정성 확보를 위한 보수·보강 및 유지관리 방안 제시

- 정밀구조안전진단 보고서 작성 등

○******************************

□ 용역기간 연장승인 내용

○ 용역기간 연장 : (기존) 2019. 8. 5. ⇒ (연장) 2019. 8. 16.

○ 연장사유

- 내진성능평가 프로그램(마이다스 젠) 오류발생에 따른 과업 중단

및 오류수정 결과 반영(’19.7.4~7.22)

-************** 부동침하 발생 및 전면 경사면의 토사 유출에

따른 대책 마련 필요성

붙 임  1. 용역업체 현황보고 공문*************************

2. 내진성능평가 구조해석프로그램 실태조사 결과 조치공문 1부

3. 내진성능평가 실무검증 리포트 1부.  끝.