“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	신림공영차고지건설공사 기본 및 실시설계용역 과업기간 변경 의뢰

1. 도시기반시설본부 설비부-11589(2019.7.30.)호와 관련입니다.

2. 도시기반시설본부로부터『신림 공영차고지(저류조포함) 건설공사 기본 및 실시설계』용역에 대하여 아래와 같이 과업기간 변경요청이 있어 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가.용역개요

1) 용 역 명 : 신림 공영차고지(저류조포함) 건설공사 기본 및 실시설계

2) 위    치 : 서울특별시 관악구 신림동 140-2번지 일대

3) 용역규모

가) 주차장 : 버스 101대 (지상, 지하1층), 관리동 및 부속시설

나) 저류조 : 빗물저류조 1개소 (V=35,000㎥, 지하2층)

4) 용역기간 : 2016. 12. 1. ~ 2019. 7. 31.

5) 도 급 액 : ************

6) 계 약 자 : *******************************

나. 변경사항

1) 과업기간 : 증 2개월

- 당초: '16. 12. 1.~'19.7.31. ⇒ 변경: '16.12. 1.~'19.9.30.

2) 변경사유 : 기 설계(2015년) 차고지 진입도로(동해엔지니어링설계분)의 설계성과품 보완 및 신림차고지 설계성과품과 통합하여 발주 성과품 작성(2개월)

- 신림공영차고지 설계성과품과의 연계성 검토

- 단가변경, 단종제품 자재의 재선정 등 / 조도 등 기술계산서 재검토

- 설계분야 공사발주를 위한 설계성과품 통합

3) 귀책소재 : 서울특별시

4) 지체상금 : 미부과

붙임  과업기간 변경요청 공문(도기본) 및 첨부파일(합의각서 포함) 1부.

	주차계획과장
주무관	김성민		차고지관리팀장	김형준		주차계획과장	07/30 박병성
협조자
시행	주차계획과-9674	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동 37)	/
전화	02)2133-2372	/전송	02)2133-1051	/	feel@seoul.go.kr	/	부분공개(7)