투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 의뢰『국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)기본 및 실시설계 건설사업관리(설계단계)용역)』

우리부에서 시행중인「국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)기본 및 실시설계 건설사업관리(설계단계)용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기(계약)를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)기본 및 실시설계 건설사업관리(설계단계)용역

2. 계약금액 : 147,890천원

3. 계 약 자 : ㈜태조엔지니어링 대표 한명식

4. 요청내용 (※계약금액 변동 없음)

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	‘18.12.21 ~‘19.07.31.	‘18.12.21 ~‘19.10.16.

5. 예산과목 : 안전총괄본부 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충(도시개발특별회계), 국회대로 지하차도 및 상부공원화, 시설비 및 부대비, 감리비

6. 귀책소재 : 발주처

7. 지체상금 부과여부 : 미부과

8. 연기 사유 :국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계) 기본 및 실시설계 용역」의 과업기간연장(‘19.6.31→’19.09.30)됨에 따라 연계하여 시행중인「국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)기본 및 실시설계 건설사업관리(설계단계)용역」의 과업기간을 연기하여 실시설계 도서의 효율적 검토를 위하여  ‘19.10.16까지 연기하고자 함.

붙임 1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 각 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	김소연		방재시설과장	代김상용		방재시설부장	07/30 이임섭
협조자	주무관	노진우
시행	방재시설부-11249	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 (무교동, 프리미어플레이스 빌딩 14층)	/
전화	02)3708-8763	/전송	02)3708-8756	/	ruracom@seoul.go.kr	/	부분공개(5)