준공기한 연기보고서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박새롬	代권영안	07/31 김홍준

	명에의거 “2019년 은평구 관내 상수도공사” 시행중 수요가로부터 건축공사 공정지연으로 인한 공사연기원이 접수되어 아래와 같이 준공연기 보고합니다.
2019. 7. 31.
복명자 : 지방시설서기 성명 : 박 새 롬

복 명 내 용
건 명	준공기한 연기보고서
내용	1. 공사위치 : ***************** 2. 신 청 인 : *** 3. 작업지시번호 : 신설-62 4. 급수공사종별 : 신설 5. 보고내용 - 상기 위치에 급수공사 작업지시하였으나 건축공사 공정지연되어 건축 공사 업체에서 비계 철거 후로 인입 공사연기를 요청해옴에 따라 공사기간내 공사가 불가능한 실정임. 6. 조치의견 - 상기위치의 급수공사 준공기한을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다. ◆ 당초 공사기간 : 2019.07.18. ~ 2019.07.29. 변경 공사기간 : 2019.07.18. ~ 2019.08.20. 7. 지체상금 부과여부 : 미부과
비 고

따로붙임 : 공사연기원 1부.  끝.