투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	개봉철도 성능개선공사 착공계획 알림

1. 우리 본부에서 추진하고 있는 ‘개봉철도고가 성능개선공사’와 관련 본교(개봉철도고가)에 대한 공사착공은 단계별 착수계획에 따라, 2020년 1월부터 착수할 예정임을 알려드리오니 원활한 공사추진이 될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

2. 아울러 공사 완료 후 원활한 인수·인계를 위하여 공사 중에 언제라도 참관하여 귀 사업소의 의견을 주시면 최대한 반영할 예정임을 알려드립니다.

가. 사업개요

- 공 사 명 : 개봉철도고가 성능개량공사

- 공사기간 : 2019. 5. 3. ~ 2021. 11. 2.

- 사업규모 : 바닥판 교체(3,292㎡), 거더교체(54본), 가교설치(연장177m, 폭2차로)

- 시 공 사 : 홍익산업개발(주)

- 감 리 단 : ㈜유신, ㈜한맥기술, ㈜경동엔지니어링

나. 단계별 착공계획

- 1단계 : 가설교량 설치 (2019. 8. 1. ~ 2019. 12. 31.)

· 개봉철도고가 : 양방향 차량 통행

- 2단계 : 본교(오류IC 방향) 철거 및 성능개선 공사 (2019. 12. 21. ~ 2020. 9. 15.)

· 개봉철도고가 : 구로IC 방향 차량 통행

- 3단계 : 본교(구로IC 방향) 철거 및 성능개선 공사 (2019. 9. 1. ~ 2021. 5. 31.)

· 개봉철도고가 : 오류IC 방향 차량 통행

- 4단계 : 가설교량 철거 및 현장정리 (2019. 6. 1. ~ 2021. 11. 2.)

· 개봉철도고가 : 양방향 차량 통행 및 준공전 합동점검.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	강서도로사업소장(도로보수과장),강서도로사업소장(시설보수과장),강서도로사업소장(기전과장)
주무관	김동수		터널건설과장	여용석		토목부장	07/31 代이동훈
협조자
시행	토목부-13708	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2587	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개