투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사) 납품기한 연기 요청

1. 우리 본부에서 시행하고 있는 『서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사』에 소요되는  관급자재에 대해 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 변경내용

구 분	계약번호	계약금액(원)	납품기한		계약상대자	비 고
			당 초	변 경
전관방송 및 AV 설비	00168302710	35,845,400	**********	**********	㈜인터엠	3자단가
	00177046500	28,635,000	**********	**********		〃
	00186041300	2,200,000	**********	**********		〃
	00166168202	37,000,000	**********	**********	㈜넥스트신성	〃
	00166181601	3,130,000	**********	**********	한결하이테크	〃
	00165132002	2,080,000	**********	**********		〃
	00176025602	2,540,000	**********	**********		〃
	00176131900	436,000	**********	**********	㈜나이츠넷	〃
	00168303608	292,500	**********	**********	㈜디라직	〃
영상감시장치	00177050102	49,277,000	**********	**********	㈜이노뎁	〃
	00178217400	6,174,600	**********	**********		〃
네트워크장비	00176131900	43,556,000	**********	**********	㈜나이츠넷	〃
	00176144100	22,000,000	**********	**********	㈜아이티원	〃
통합배선반	12182053001	163,572,000	**********	**********	㈜지준시스템	총액

나. 연기사유 : 별관동 평면변경으로 인한 선행공정(건축) 지연에 따른 설치시기 미도래

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 감리단 실정보고문(관급자재 계약기간변경 및 합의각서) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	곽진곤		시책사업과장	이종근		설비부장	07/31 임정규
협조자
시행	설비부-11737	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)