“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	과업내용 추가에 따른 용역 변경계약 요청(교통사고다발 어린이보호구역 진단및설계)

1. 「교통사고다발 어린이보호구역 진단 및 설계 용역」수행 과정에서 사업 목표달성을 위해 필수적으로 필요한 사항이 추가로 발생하여 용역 변경계약을 다음과 같이 요청합니다.

가. 변경사항

1) 추가내용 : 보행신호기, 차량신호기, 신호제어기 등 교통안전시설물 45개소에 대한 전기공사 실시설계 내역서 추가

2) 사업기간 : 1개월 연장( 3. 4. ~ 8. 3. → 3. 4. ~ 9. 3.)

3) 사업금액 : 12,700,000원 증액(244,684,600원 → 257,384,600원)

※ 교통신호기 실시설계 단가 기준

4) 기  타 : 발주처 요청에 의한 경우로 지연배상 대상이 아님.

붙임. 1. 방침서 1부.

2.설계내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	보행정책과장
주무관	김종민		보행안전팀장	윤복철		보행정책과장	07/31 박태주
협조자
시행	보행정책과-250	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-2425	/전송		/		/	부분공개(6)