문서번호	역사도심재생과-8368
결재일자	2019.7.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도심정책팀장	역사도심재생과장
김성자		이기원	07/31 代이기원
협조

- 을지로 입체보행공간 조성 설계공모 관리 -

용역 준공기한 연기보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

도시재생실

(역사도심재생과)

을지로 입체보행공간 조성 설계공모 관리

용역 준공기한 연기보고

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 을지로 입체보행공간 조성 설계공모 관리용역

❍ 과업기간 : ‘19.1.21 ~ 8.20

❍ 계약금액 : 금98,835,000원(금구천팔백팔십삼만오천원정)

❍ 계약업체 : 엠에이건축사사무소

❍ 용역범위

- 공간범위 : 을지로일대 지상·지하 보행로 주변지역(시청역~동대문역사문화공원역, 길이 3km)

- 내용범위 : 설계공모 관리 전반

❍ 주요 과업내용

- 설계공모를 위한 지침서 작성 및 자료일체 정비

- 공모실시 및 심사 지원, 홍보 및 홈페이지 관리·운영

- 시상 준비 및 지원, 작품전시 및 활용방안 마련

- 작품집 제작 및 발송

- 공모결과 반영, 기본 및 실시설계를 위한 설계지침서 작성 등

□ 추진현황

❍ ‘18.12.07. : 용역 추진계획(변경) 방침(역사도심재생과-14117호)

❍ ‘18.12.19.~’19.01.09. : 입찰공고

❍ ‘19.01.11. : 제안서 평가(협상적격자 선정)

❍ ‘19.01.21. : 계약 체결 및 용역 착수

❍ ‘19.03.01.~04.30. : 용역 일시 중지(61일간)

❍ ‘19.07.23. : 설계공모 운영위원회 구성 및 운영계획 방침(역사도심재생과-8101호)

□ 계약 변경사항

❍ 과업기간

- 준공기한 : 당초) ‘19.8.20 ⇒ 변경) ’20.3.31

- 변경사유 : 을지로 입체보행공간 조성 기본계획(‘19.7.22)에 따라 설계공모 운영위원회 구성, 공모지침 작성 등 설계공모 절차이행을 위한 과업기간 연장이 필요함

❍ 귀책소재 : 서울특별시

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후계획

❍ ‘19.07.31. : 준공기한 연기의뢰(재무과)

❍ ‘19.07.~’20.03. : 설계공모 시행

❍ ‘20.03.     : 용역 준공

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 연장요청 공문 및 합의각서 1부.  끝.