문서번호	설비부-11784
결재일자	2019.8.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
곽진곤	이종근	08/01 임정규

관급자재 수량변경 및 납품기한 연장 검토 보고

(서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사)

2019. 8.

『서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사』

관급자재 수량변경 및 납품기한 연기 검토 보고

『서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사』관급자재와 관련, 별관동 평면 변경으로 인한 수량변경 및 납품기한 연기를 다음과 같이 보고 드림

관련근거

❍ 건설사업관리단 실정보고문 제출

- 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사 별관동 관급자재 계약기간변경 합의각서 제출(한종홍릉 제2019-1537호(’19.07.30.)

- 별관동 전기공사 관급자재 조명등 수량 및 계약기간변경 합의각서 제출(한종홍릉 제2019-1540호(’19.07.31.)

공사개요

❍ 사 업 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사

❍ 공사위치 : 동대문구 회기로 117-3(舊 한국농촌경제원)

❍ 공사규모 : 신관동(대수선) 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 연구시설

별관동(신축) 지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡, 연구시설

❍ 공사기간  : 2차 ‘18. 3. 20. ~ ’19. 10. 18.(총차 ‘17. 9. 28.~’19. 10. 18.)

❍ 도 급 비 : 총차 2,497,108천원 / 2차 2,247,108천원

❍ 감 리 단 : ㈜한국종합건축사사무소, ㈜동양컨설턴트

❍ 시 공 사 : ㈜동양이엔티(ENT)

검토내용

❍ 관급자재 수량변경 및 납품기한 연기 사유 : 별관동 평면 변경(인테리어 공사)으로 현장 여건을 감안한 물량 조정 및 공기연장으로 인한 설치시기 미도래

❍ 변경 내용                                      (조달수수료 미포함)

계약 번호	품명	계약 상대자	당 초			변 경			비고
			수량	계약금액(원)	납품기한	수량	계약금액(원)	납품기한
00177016501	태양광발전장치	㈜지투파워	1조	63,000,000	‘19.08.16.	1조	63,000,000	‘19.10.18.	3자 단가
12182100801	수배전반		1식	208,043,000		1식	208,043,000		총액
00187014600	에너지저장장치	㈜국제통신	1set	353,168,640	‘19.08.14.	1set	353,168,640		3자 단가
12162178706	LED 조명등	서광 조명	25개	10,650,000	‘19.08.16.	25개	10,650,000		다수 공급자
00177024503	LED 조명등		21개	2,247,000	‘19.08.14.	21개	2,247,000		3자 단가
12162072820	LED 조명등		573개	50,894,000		87개	9,490,000		다수 공급자
23163086909	LED 조명등	㈜성안 조명	164	11,695,000	‘19.08.14.	0	0		계약 취소

❍ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

관급자재 추가 구매 계획

❍ LED조명 동일규격 모델중 녹색인증 제품으로 교체가능한 품목을 추가 구매

❍ 구매방법 : 조달구매(다수공급자 계약)

- 관련규정 : 조달사업에 관한 법률 제5조의 2(계약체결의 요청) 및 동법 시행령 제9조의 3 제1항 제2호 등

❍ 구매내역

조달식별번호	품 명	수량 (개)	단 가(원)	금 액(원)	비 고
23038686	LED 다운라이트, 12W	64	25,500	1,632,000
23041523	LED실내조명,40W	36	98,000	3,528,000
			조달수수료	27,860	0.54%
			합 계	5,187,860

건설사업관리단 검토의견

❍ 별관동 LED조명등은 평면 변경 및 인테리어공사로 인해 해당공간의 조명등이 인테리어제작 조명등으로 변경되어 관급으로 공급이 불가능한바 관급자재에서 해당물량을 감하고 인테리어 시공업체에서 공급하는 것으로 변경함이 타당하다고 판단되며,

❍ 준공기한이 2019.10.18.로 65일 연장되었는바 관급자재 납품기한 역시 준공기한에 맞도록 연장함이 타당하다고 사료됨.

조치계획

❍ 감리단의 관급자재 수량변경 및 납품연기 사유가 적정하다고 판단되므로, 주관부서(거점성장추진단)에 해당 인테리어제작 조명등을 인테리어 시공업체에서 공급하도록 요청하고

❍ 아울러, 총무부에 LED조명등 추가 구매와 해당 관급자재의 수량 변경 및 납품기한을 ‘19.10.18.까지 연기 의뢰하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 감리단 실정보고문 2부.  끝.