문서번호	투자창업과-8257
결재일자	2019.8.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		창업기반조성팀장		투자창업과장
노은영		백명숙		08/01 代임재근
협 조

서울창업카페 상봉점 인테리어 설계 및 공사계획

2019.8.

경제정책실

(투자창업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	■	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울창업카페 상봉점 인테리어 설계 및 공사계획

창업문화 전파와 예비창업가의 성공창업 지원을 위해 조성하는 ‘서울창업카페 10호점(상봉점)’ 설계 및 인테리어 공사를 실시하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 추진근거

○ 서울시장 후보자 60대 주요공약 (’14. 5.16)

○ 서울특별시 청년창업 지원조례 제9조

○ ’19년 서울창업카페 추가조성계획(디지털창업과-8996, ’18. 10.18)

□ 대상지 현황

○ 위    치 : 중랑구 봉우재로 93-5, 2층  ※ 1978. 9월 준공

○ 조성규모 : 231.41㎡(70평)

○ 시설현황 : 現 상봉2동 주민센터  ※ ’19. 10월 이전 예정

- 상봉2동 이전 일정 지연(신청사 준공연기)으로 공사 일정 연기(10월)

- 이전 후 1층 자치구 공동판매전시장, 2층 서울창업카페로 조성·운영

- ***************************************

○ 조성비용 : 200백만원

○ 이용대상 : 창업에 관심있는 시민 및 예비창업가, 대학생 등

○ 공간구성 : 네트워크 공간, 코워킹 스페이스, 컨설팅룸(상담, 회의) 등

○ 사업내용 : 창업 정보제공 및 전문상담, 창업 및 특화프로그램 운영 등

○ 주변여건

- 상봉역(7호선/경춘선/경의중앙선) 400m 위치로 접근성이 용이함

- 패션·봉제 스마트 앵커 구축 및 패션·봉제 활성화 거리 조성 예정

- 인근 대학(서일대, 광운대, 서울여대, 서울과기대, 육사 등)과 산학협력 연계 등 협업이 가능하고 청년 유동인구가 많고 창업수요 많음

<위치도>		<외부 전경>
<내부 전경_2층강당>		<내부 전경_2층 동장실>

Ⅱ		추진계획

□ 조성방법 : 설계용역 및 인테리어 리모델링 공사

○ 공간설계(기획, 기본 및 실시 설계) : 수의계약

- 사유 : 소액(16,500천원 이하), 공사기간 단축

· 추정가격이 2천만원 이하의 소액 용역사업으로 사업현황을 잘 알고 있고 검증 실적이 있는 업체로 선정하여 용역 연구를 원활하게 추진

· 공개 입찰 시 공고부터 설계도 완성까지 30일 이상 소요되기에 수의 계약하여 공사 기간 단축

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호

○ 설계기본방향

- (가변형 공간장치) 창업공간의 특성을 살려 노후화된 주민자치센터 내부시설 및 단조로운 공간구조 등을 극복하고, 민간위탁운영사 및 창업가의 다양한 아이디어와 운영프로그램 등을 반영할 가변형 공간장치로 조성, 공간을 최대한 변경․활용 할 수 있도록 설계

- (최소한의 기본설계) 향후 이전․철거계획 및 내부벽체 노후화에 따른 균열 발생 등으로 기존 내벽 철거 및 공간구획 등을 최소화하여 기본설계 및 구조보강 마감에 주력

- (창의적, 색채적 공간 조성) 일괄된 건축 마감보다는 예비창업가나 시민들에게 시각적, 창의적 감각을 체험, 제공하기 위한 인테리어 공간 연출 필요

○ 공간조성(인테리어 공사) : 공개경쟁입찰(지역제한-서울시에 소재하는 업체)

- 근거법령: 지방차지단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 제9조

· 전기통신공사업법 제3조 제1항 및 동법 시행령 제5조, 제8조에 의거 인테리어 공사 중 전기·통신공사는 분리발주

□ 창업카페 구성(안)

구분	네크워크 공간	코워킹 스페이스	컨설팅룸(상담,회의)
전경

Ⅲ		향후 일정

□ 추진일정

○ 기술용역타당성 심사(기술심사담당관)                   : ’19.8월

○ 서울창업카페 인테리어 설계용역 의뢰 및 설계           : ’19.8~9월

○ 서울창업카페 위탁기관 선정(자치구)                      : ’19.10~11월

○ 인테리어 공사 발주 및 추진                           : ’19.10~12월

○ 창업카페 개관(상봉점)                                 : ’20.1월

□ 행정사항

○ 당해년도 내에 공사가 준공될 수 있도록 ’19. 9월까지 주민센터 청사이전 및 ’19. 11월까지 민간위탁기관 선정완료(자치구).  끝.