문서번호		신호처-2785		과장		부장	처장	본부장		사장
등록일자		2019.05.29.
										05/29
결재일자		2019.05.29.
공개여부		대시민공개
				협조	예산처 처장
방침번호		사장-566
					승무시스템처 처장
					신호2사업소 소장
	「5호선 연장구간(하남선) 건설 및 개통 관련」 고덕차량기지 및 상일동역 연동검사 시행계획(안)
2019. 5.
신호처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	■	□
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	■	□
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	■	□
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적성성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■

「5호선 연장구간(하남선) 건설 및 개통 관련」

고덕차량기지 및 상일동역 연동검사 시행계획(안)

5호선연장 건설구간(하남선)과 현 영업운영구간의 연결역(상일동) 및 고덕차량기지 신호시스템에 대한 연동검사를 시행함으로써 열차 안전운행 조건을 확인하고 연장구간 열차안전 확보 및 차질없는 개통에 기여하고자 함.

1		관련 근거

가. 신호설비 보수규정시행내규 제8조(연동검사) 및 신호설비관리예규 제4장(연동검사)

연동검사(聯動檢事): 신호기, 선로전환기, 궤도회로장치 및 TTC시스템 등 신호시스템의 종합적인 기능을 점검 및 확인하기 위한 검사로 설비신설, 개량 및 정기검사(3Y)시 시행

나. 서울특별시 도시철도설비부-4878(2019. 5.24.)「하남선(5호선 연장) 건설사업 신호시스템 연동검사 일정 변경 알림」

2		시행 개요

가. 검사대상역: 5호선 고덕차량기지, 상일동역

나. 검사시스템: 신호시스템 운전조작반 등 6종 332대

설 비 명	주요 기능	검사수량	비 고
운전조작반	신호취급(제어), 시스템감시	2	교체설치
전자연동장치	신호현시, 선로전환기 전환, 진로제어	2	교체설치
ATO장치	차량과 데이터 전송, 정위치정차, D/L제어	3	교체설치
속도코드제어장치	궤도회로장치의 제한속도 명령 선택	2	신설
선로전환기	차량 운행방향 변경을 위한 선로	74	신설 3대
궤도회로장치(AF/PF)	열차 검지, 제한속도 명령 송출	249	신설 12대

다. 기 간: 2019. 6. 3. ~ 6.14. [해당기간 중 총 7일]

구 분	대 상	기 간	비 고
5호선 영업구간	고덕기지	2019. 6. 3. ~ 7 (주/야간) (4일)	우리공사 입회
	상일동역	2019. 6.12. ~ 14. (야간) (3일)

※ 2019. 5.27 ~ 31일까지는 고덕차량기지 신호시스템 개별시험 시행

3		추진 계획

가. 연동검사 업무체계

	ㆍ터널내 차량접촉한계 측정 ㆍ분기부 설치위치 확인 ㆍ선로전환기 설치위치 준수 확인 ㆍ도시철도 건설규칙 기준 준수여부 확인 등

나. 주요 검사내용: 연동도표 및 검사표에 의거 시행

1) 신규 전자연동장치 제어기능 시험 및 연동(연쇄)조건 검사

2) 종합관제센터와 신호제어 인터페이스 시험

3) 신설 신호제어반(S/W 포함), 선로전환기 및 궤도회로 성능시험

4) 신호기계실 및 현장설비 시공상태 등

다. 검사 참여자 : 서울시 도시기반시설본부, 우리공사(승무/신호분야), 감리단(신우이엔지), 시공사(대아티아이) 등 (붙임 참조)

라. 연동검사 세부 일정 및 시행내용: 총 7일

일 시	장 소	작업 내용	점검 인원	비 고
6. 3.(월) (01:00~04:30)	고덕 기지	연동시험 (연번 1~10)	신호처 (1) 신호2사업소 (2)	야간 3.5H
(11:00~15:00)		연동시험 (연번 11~23)	신호2사업소 (1)
6. 4.(화) (01:00~04:30)		연동시험 (연번 24~36)	승무시스템처 (1) 신호처 (1) 신호2사업소 (1)	야간 3.5H
(11:00~15:00)		연동시험 (연번 37~49)	신호처 (1) 신호2사업소 (1)
6. 5.(수) (01:00~04:30)		연동시험 (연번 50~62)	신호처 (1) 신호2사업소 (1)	야간 3.5H
(11:00~15:00)		연동시험 (연번 63~82)	신호2사업소 (1)

일 시	장 소	작업 내용	점검 인원	비 고
6. 7.(금) (15:00~18:00)	고덕 기지	미비사항 정리 및 종료회의	승무시스템처 (1) 신호처 (1) 신호2사업소 (1)
6.12.(수) (01:00~04:30)	상일동	신호기계실/현장 설비 점검 신호시스템 개별시험	신호처 (1) 신호2사업소 (1)	야간 3.5H
6.13.(목) (01:00~04:30)		연동시험(연번 1~8)	승무시스템처 (1) 신호처 (1) 신호2사업소 (1)	야간 3.5H
6.14.(금) (01:00~04:30)		연동시험(연번 9~11) 미비사항 정리 및 종료회의	신호처 (1) 신호2사업소 (1)	야간 3.5H

※ 상기일정은 서울시 추진계획 및 현장사정에 따라 변경될 수 있음.

마. 연동검사 후 신호시스템 운영절차

고덕기지

연동검사 종료		궤도 선형 변경		외부 안전점검		신규장비 운용
기존장비 운용		유치선 및 하남 출고선		연동검사 및 시스템 안전점검		신규 장비 운용 및 종합시운전시행

	종합시험운행		시설물 인수
	서울시, 교통안전공단		서울 교통공사

상일동

연동검사 종료		외부 안전점검		궤도 선형 변경		관제 개량 완료
기존장비 운용		연동검사 및 시스템 안전점검		하남방향 연결		연동검사 및 시스템 안전점검

	신규장비 운용		종합시험운행		시설물 인수
	신규 장비 운용 및 종합시운전시행		서울시, 교통안전공단		서울 교통공사

바. 운용안전 관리

기존 운영중인 우리공사 신호시스템에 대한 재구축 사업으로 이례상황 발생 대비 긴급복구체계 지속유지 및 업체 유지보수자 상주

4		행정 사항

가. 상일동역 연동검사결과 보고 (신호2사업소)

나. 연동검사 참여자 야간근무 시행 및 초과근무실적(수당지급분) ERP입력

다. 휴일 및 시간외 근무를 시행하는 연동검사 참여자는 대체 휴무 부여

라. 관련부서 협조사항

1) 제2종합관제센터: 상일동역 열차 주박 금지 및 관내 작업 통제

2) 고덕기술센터

□ 고덕차량기지 모타카 운행 및 선로차단작업 연동검사자와 협의 후 시행 협조

□ 시스템 안전관리 및 시스템 복구체계 유지

마. 예산사항: 일금 삼십사만삼천팔백오십원정(￦343,850) [보수(인건비)]

※ 연동검사 추진일정에 따라 실근무 실적으로 야간수당 지급

□ 붙 임:	1. 고덕차량기지 및 상일동 선로도 및 시스템 배치도 1부
	2. 연동검사, 사고보고 체계도 및 안전조치 사항 1부
	3. 고덕차량기지 및 상일동 연동검사표 1부
	4. 연동검사 일정 및 참가자 명단 1부
	5. 초과근무 및 수당 산출내역서 1부. 끝.