문서번호		토목처-4777		차장		부장	팀장	처장		본부장
등록일자		2019.07.05.
										07/05
결재일자		2019.07.05.
공개여부		대시민공개
				협조	궤도처 처장
방침번호		본부장-133
	역사 배수시설 개선 계획 보고
2019 . 07.
토목처

역사 배수시설 개선 계획 보고

집수정 유입구 및 도상 횡단배수로 개선을 통하여 집수정으로 유입되는 청소수의 선로 내 배수정체 문제를 해결하여 전사적으로 추진되는 미세먼지 저감 대책에 부응코자함

Ⅰ		관련근거

□ 사장님 보고(‘19.5.28)「역사배수로 개선계획 보고」

□ 토목처-3566(‘19.5.17.)「역사 노반 배수로 상습정체 및 월류개소 조사 요청」

Ⅱ		역사 배수로 현장조사

□ 역사 배수로 현장조사 개요

□ 역사 노반 배수로 상습정체 및 월류개소 조사(‘19.5월~6월)

- 1~4호선 : 궤도1사업소, 5~8호선 : 토목2사업소

□ 배수로 개선 유형

- 집수정 유입구 개선 : 배수로와 유입구 단차 해소 또는 유입구 추가

집수정	오수조 침사조 저수조
유입구 높이 인하	유입구 추가설치

- 횡단배수로 개선 : 도상 좌우측 배수로를 연결하는 횡단배수로 추가설치

□ 배수로 개선 유형별 대상개소

호선	집수정 유입구 단차해소 또는 추가		횡단배수로 확대 또는 추가
합계	23역, 26개소		10역, 13개소
1호선	1	동대문	3	종로3가, 종로5가, 동대문
2호선	3	홍대입구, 신촌, 선릉	1	신촌
3호선	6	녹번, 금호, 신사, 매봉, 학여울, 대청	1	고속터미널
4호선	5	수유, 미아사거리, 길음(2개소), 성신여대, 신용산	1	수유
5호선	4	양평, 신길, 마천, 충정로(2)	1	화곡(2개소)
6호선	0	-	0	-
7호선	4	마들, 군자(2개소), 장승배기, 대림	3	수락산(2개소), 마들, 이수(2개소)
8호선	0	-	0	-

Ⅲ		개선계획

□ 유형별 사업계획

구분		대상개소	개략사업비 (백만원)	시행시기	시행부서
합계		-	84.5	-	-
집수정 유입구 개선	소계	26	39
	1~4호선	16	24	‘20년	토목1사업소
	5~8호선	10	15	‘19년 하반기	토목2사업소
횡단 배수로 개선	소계	13	45.5
	1~4호선	6	21	‘20년	궤도1사업소
	5~8호선	7	24.5	‘19년 하반기	토목2사업소

※ - 집수정 유입구 추가 : 1.5백만원/개소,  횡배수로 추가 : 3.5백만원/개소

- 대상개소는 시행부서 현장 상세점검 결과에 따라 변경 가능

□ 향후계획

□ ‘19년 추진사업 : 현장 상세점검 후 설계/발주 및 공사시행((’19.7월~) – 토목2사업소

□ ‘20년 추진사업 : 현장 상세점검 및 예산편성(’19년) – 시행부서

붙 임 : 역사 집수정 유입구 및 횡단배수로 불량개소 조사결과 1부  끝.