“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(을지로 입체보행공간 조성 기본계획 수립용역)

1. 역사도심재생과-8462(2019.08.01.)호와 관련입니다.

2. 을지로 입체보행공간 조성 기본계획 수립용역에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 을지로 입체보행공간 조성 기본계획 수립용역

- 계 약 자 : **************************

- 계약금액 : *************

나. 계약변경사항

- 과업기간 : 당초 ‘19.1.15~8.20 ⇒ 변경 ’19.1.21~12.31

다. 과업기간 변경사유

- 을지로 입체보행공간 조성사업의 마스터플랜 수립 및 성과품 작성 등을 위한 과업기간 연장이 필요함

라. 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책:서울특별시)

붙임 : 1) 준공기한 연기보고서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.

3) 합의각서 및 관련공문 1부.  끝.

	역사도심재생과장
주무관	김성자		도심정책팀장	이기원		역사도심재생과장	08/01 代이기원
협조자
시행	역사도심재생과-8474	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 세종대로 110(태평로1가 31번지) 11층	/
전화	02-2133-8489	/전송	02-2133-0742	/	kimstarj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)