투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기요청

1. 기전과–7453호(2018. 8. 1.)와 관련입니다.

2. 화곡터널 저압수전 전기공사 관급자재인 저압배전반 제작구매 설치에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 화곡터널 저압 배전반 제작구매 설치

나. 대상품목

물품분류번호	물품식별번호	품 명	규 격	단위	수량
39121103	22848634	배전반	폐쇄형배전반, 디투엔지니어링, d2-HVC-10-SSM500L, 일체형, MOLD, 500kVA	면	1
39121103	22848522	배전반	폐쇄형배전반, 디투엔지니어링, d2-HVC-10-TRM500, 특고압반, MOLD, 500kVA	면	1
39121103	22848648	배전반	폐쇄형배전반, 디투엔지니어링, d2-HVC-10-SSO150L, 일체형, OIL, 150kVA	면	1

다. 요청내역 : 납품기한 연기

납품기한	당초	변경	비고
	2019. 8. 9.	2019. 8. 28.

라. 귀책사유 : 서울시 (지체상금 미부과)

마. 연기사유 : 저압 배전반 납품 후 설치시 까지 보관할 장소가 협소하여, 주변 미관 및 안전사고 우려가 있고, 공사의 원활한 추진을 위해 공사업체와 납품업체 간 납품일정 관리가 필요함.

바. 수량 및 금액 : 변경없음.

붙임 : 1. 납품기한 연기 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	황대성		기전과장	08/01 서승완
협조자
시행	기전과-7473	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7961	/전송	02-2657-7939	/	hds2003@seoul.go.kr	/	대시민공개