투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	레오개발(주) 대표 양공진 귀하
(경유)
제목	2019년 도로시설물 일상유지보수공사 변경 작업지시(제2019-3차)

1. 시설보수과-4550(2019.5.27.)호 및 시설보수과-6411(2019.7.24.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소와 계약체결후 공사시행중에 있는 2019년 도로시설물일상유지보수공사(터널,지하차도,복개-강서)와 관련하여 아래와 같이 변경 작업지시(3차)하오니, 기한내 작업완료하고 전·중·후 사진을 첨부한 작업결과를       2019.10.30.까지 제출하여 주시기 바라며,

3. 공사시행 전 안전사고 예방을 위한 사전교육을 시행하고, 견실한 공사가 진행될 수 있도록 공정 및 품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시설물명 : 등촌지하차도

나. 작업기간 변경

당초 : 2019.06.01. ~ 07.30

변경 : 2019.06.01. ~ 10.30

다. 변경사유 : 등촌지하차도 보수공사의 도로포장계획 변경(아스콘→LMC)에 따라 포장두께 변경이 예상되고 있어 포장높이에 맞추어 배수로 시공이 필요

라. 작업지시내역 : 별첨

붙임  1. 작업지시서(제3차) 1부

2. 관련자료(제3차) 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤동원		시설보수과장	박병연		강서도로사업소장	08/01 박문희
협조자	주무관	강연홍
시행	시설보수과-6645	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개