투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 수량변경 및 납품기한 연기 의뢰(서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사)

우리 본부에서 추진중인 『서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사』에 소요되는 관급자재와 관련하여 아래와 같이 수량변경 및 납품기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약변경 요청 내용

납품요구번호 (계약번호)	물품 식별번호	품 명	당초			변경			계약 업체
			수량	금액(원)	납품기한	수량	금액(원)	납품기한
121823150600 (00177016501)	23054232	태양광 발전장치	1	63,000,000	‘19.8.16.	1	63,000,000	‘19.10.18.	㈜지투 파워
(12182100801)	21788197	수배전반	1	208,043,000		1	208,043,000
121824747400 (00187014600)	23290910	에너지 저장장치	1	353,168,640	‘19.8.14.	1	353,168,640		㈜국제 통신공업
121815800700) (12162178706)	22878752	LED 경관조명	10	4,500,000	‘19.8.16.	10	4,500,000		서광 조명
	22976660		10	4,500,000		10	4,500,000
	22811705	LED 투광등	5	1,650,000		5	1,650,000
121815801000 (00177024503)	23218949	LED 실내조명등	21	2,247,000	‘19.8.14.	21	2,247,000
121815800800 (12162072820)	22249925	LED 다운라이트	64	2,880,000		0	0
	23275614	LED 실내조명등	17	1,020,000		17	1,020,000
	22263209		28	4,900,000		28	4,900,000
	22730946		5	585,000		0	0
	22547887		81	10,773,000		0	0
	22253307		137	14,111,000		0	0
	22249929		24	2,520,000		21	2,205,000
	22424786	LED 다운라이트	217	14,105,000		21	1,365,000
121815800900 (23163086909)	22313573	LED 실내조명등	95	6,175,000		0	0	계약취소	㈜성안 조명
	22313575		69	5,520,000		0	0

나. 수량변경 및 납품기한 연기 사유 : 별관동 평면 변경(인테리어공사)으로 현장 여건을 감안한 물량 조정 및 공기연장으로 인한 설치시기 미도래

붙임 : 1. 관급자재 계약변경 방침서 1부.

2. 계약서류 7부.

3. 합의각서 7부.  끝.

	설비부장
주무관	곽진곤		시책사업과장	이종근		설비부장	08/02 代여인웅
협조자	재무예산과장	代이강준
시행	설비부-11858	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)