투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(용역변경계약(양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역) 체결 알림)

1.업무지시현장 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)(1차)-도기본 주식회사

경동엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2019-08-02 11:08:39

3.지 시 내 용

가. 경동 제2019-1424(2019.07.18.)호와 관련입니다

나. 위 대호로 요청한 『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』 계약건에 대하여 계약기간 변경계약이 체결되었음을 알려드리니 안전관리 및 공정관리 등 업무수행에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

1)변경계약 체결현황

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
총차	계약기간	2016.10.10.~2019.08.04.	2016.10.10.~2019.11.15.	증)103일
	계약금액	1,594,670,000원	1,813,460,000원	증)218,790,000원
3차	계약기간	2019.01.16.~2019.08.04.	2019.01.16.~2019.11.15.	증)103일
	계약금액	510,741,000원	729,531,000원	증)218,790,000원

끝.

주무관							차성민			치수시설과장					조성만					방재시설부장					08/02 이임섭
협조자
시행			방재시설부-11460									(						)		접수											(						)
우	04809					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부															/
전화		02-3708-8785						/전송								/	csm0528@seoul.go.kr												/	부분공개(6)