문서번호	설비부-11925
결재일자	2019.8.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		김오열	08/05 임정규
협 조

- 서울 공예박물관 조성 전기공사 -

관급자재(케이블트레이) 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 08.

도시기반시설본부

설비부

- 서울 공예박물관 조성 전기공사 -

관급자재(케이블트레이) 납품기한 연기 검토 보고

본 전기공사 진행중 공예박물관 건물별 평면 및 용도 변경 설계용역이 추가로 `19.10월말까지 진행되고 있으며, 관련하여 관급자재인 케이블트레이도 변경사항이 발생하여 납품기한 내에 납품이 불가하여 납품기한을 연기코자 보고 드림. ▷변경사유 : 건물별 평면 및 용도 변경계획 반영 요청(서울공예박물관 총무과-2275호, `19.3.22.) ▷변경 설계용역(설비) 완료 : `19.10월말 / 케이블트레이(전기) 납품기한 : `19.9.1.
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 서울 공예박물관 조성 전기공사

□ 공사위치 : 종로구 율곡로 3길 4(구 풍문여고 부지)

□ 공사기간 : 총차 `18.05.15. ~ `20.02.03.

1차 ` 18.05.15. ~ `19.10.31.

□ 도 급 비 : 총차 금2,157,720,005원

1차 금500,000,000원

□ 계 약 자 : 서봉기업(주) 대표 김영태

□ 공 정 율 : 2019.08월 현재

○ 건축( 37.06%), 전기(36.62%), 통신(12.27%)

2		관급자재 계약현황

□ 품목별 계약내용

○ 계약건명 : 서울 공예박물관 조성 전기공사 케이블트레이 구매

계약번호	품명	계약자	계약금액(원)	납품기한
00168201506	케이블트레이	태양트레이(주)	16,639,700	`19.09.01.

□ 납품기한 연기내용

○ 관련근거

- 서울 공예박물관 조성공사 공기연장 시행 : 건축부-12422호(`19.7.22.)

- 관급자재(케이블 트레이) 납품일정 변경 검토 보고 : 무영공예CM 제2019-255호(`19.8.5.)

○ 납품기한 연기사유

- 아래 변경 설계용역 진행내용과 같이 건물별 평면 및 용도 변경계획의 변경 설계용역이 완료되는 시기가 `19.10월말까지로 관급자재인 케이블트레이 설계변경을 당초 납품기한내(`19.9.1)에 완료가 불가한 실정이기에 계약물량 설계변경 완료와 현장 반입시기를 고려하여 최종 `19.11.30일까지 연기하여 케이블 트레이 설치작업에 만전을 기하고자 함.

※ 변경 설계용역 진행내용

구분	변경 설계용역 진행일정	비고
(건축공사) 건물별 평면 및 용도 변경설계	`19.09월말 완료	건축설계
(전기공사) 변경건축에 따른 설비 변경설계	`19.10월말 완료 (건축 변경설계 완료일로부터 30일소요)	설비설계

○ 납품기한 연기 세부 내용

- 전기공사(관급자재)

계약명	계약번호	계약자	계약금액(원)	납품기한
				당초	변경
서울 공예박물관 조성 전기공사 케이블트레이 구매	00168201506	태양트레이(주)	16,639,700	`19.09.01.	`19.11.30.

○ 귀책 소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미 부과

3		조 치 계 획

□ 당초 조달 구매 요청한 전기공사의 관급자재인 케이블트레이의 납품기한을 `19.11.30일까지 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 책임건설사업관리기술자 검토의견서(전기) 1부. 끝.