문서번호	방재시설부-11580
결재일자	2019.8.5.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
차성민		조성만	08/05 이임섭
협조

『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사』

설계변경(신규비목) 협의율 검토보고

2019.08

도시기반시설본부

(방재시설부)

『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사』

설계변경(신규비목) 협의율 검토보고

「양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사」와 관련하여, 생태체육공간 운동장 조성 신규비목에 대한 협의율 조정 요구가 있어 검토 결과를 보고드림.

(관련문서 : 양평1유건 제2019-211호(‘19.7.29) 신규 적용단가 협의율 조정요청의 건)

□ 근    거

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제65조 3항 3호

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약일반조건 제7절1항

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

□ 공사개요

○ 규    모 : 우레탄포장 3,870.6㎡, 측구배수로 281m

- 생태체육공간 운동장 조성

○ 위    치 : 영등포구 양평동3가 57-3(양평빗물펌프장 내)

○ 계약금액 : 20,653백만원(전체), 4,119백만원(3차분)

○ 계약년월일 : 총차 2016년 11월30일, 3차 2019년02월28일

○ 착공년월일 : 총차 2016년 12월05일, 3차 2019년03월01일

○ 준공년월일 : 총차 2019년 11월15일, 3차 2019년11월15일

○ 시공 / 감리 : 대우산업개발(주)외 2개사/(주)경동엔지니어링 외 3개사

□ 추진경위

○ ‘18.10.30 : 영등포구청 문화체육과-31906

(양평1유수지 저류조 상부 활용방안 의견 체출)

○ ‘18.11.05 : 물순환정책과-20063호

(양평1유수지 CSOs 저류조 상부 활용에 따른 설계요청)

○ ‘19.01.11 : 도시기반시설본부-19-469호

(저류조 상부 생태체육시설 조성관련 보완설계 추진 지시)

○ ‘19.01.30 ~ ‘19.03.07 : 생태체육공간 조성 관련부서 합동회의(1차~3차)

○ ‘19.04.04 : 생태체육공간 조성 관련 주민설명회

○ ‘19.05     : 영등포구청 관련부서 협의 및 실시설계착수

○ ‘19.04.04 : 생태체육공간 조성관련 실시설계 완료 보고

□ 협의율 조정 회의개최

○ 일    시 : 2019.07.25. 15:00

○ 장    소 : 도시기반시설본부 방재시설부 회의실

○ 참 석 자 : 공사관리관(토목,조경) 2명, 현장대리인, 건설사업관리단

○ 회의내용 : 생태체육공원관련 조경 및 토목 신규비목에 대한 단가 협의율 조정

○ 협의율 조정

- 발주처 의견 : 낙찰율(81,13%) 적용

- 시공사 의견 : 원활한 품질확보 및 작업의 난이도 및 안정성고려 설계

단가의 100% 적용.

□ 조치계획

○ 시공사에게 낙착율(81.13%) 적용을 지속적으로 권고하였으나 유수지

내 열악한 여건과 작업의 난이도 및 안전성을 고려하여 설계가 100%

적용을 요구 계약당사자간에 원만한 협의가 이루어지지 않아, 강제협의율

조정으로 결정코자함.

- 강제협의율 : (81,13%+100%)/2 = 90.56%

붙임  협의율 조정 회의록 및 협의율 조정 요청 1부. 끝.