투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2019년 전기시설물 유지보수공사(연간단가) 설계변경(제1회) 시행

1. 시설과-5217호(‘19.07.24)와 관련입니다.

2. 우리 대공원에서 시행중인 2019년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)에 아래와 같이 설계변경(제1회)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2019.1.31 ∼ 2019.12. 31

다. 시 공 자 : *************

라. 변경 내역

****	****	****	***	**
*****	************	************	**********	*******

마. 설계변경사유 : 물량증감 및 신규내역 반영

바. 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝

주무관	김희원		주무관	이춘한		시설과장	양희상		관리부장	08/05 심상원
협조자	주무관	정한성		총무과장	代강준민
시행	시설과-5545	(		)	접수		(		)
우			/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7432	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(5)