문서번호	급수운영과-15908
결재일자	2019.8.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
윤승구	최용진	08/05 유승효
협 조

단 수 작 업 계 획 서

(2019년 도봉,노원구관내 상수도시설물 설치및보수공사(노후밸브교체))

2019. 8.

북부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

단 수 작 업 계 획

□ 공사현황

- 공 사 명 : 2019년 도봉,노원구관내 상수도시설물 설치및보수공사 (장기계속단가계약)

- 공사개요 : ******************

- 시공회사 : ***************

□ 지역별 단수계획

연번	작업지시번호	단수위치	단수예정일	단수시간	단수세대	비고
1	시설물-59	***********	*************	************* *****	****

□ 공사배관 상세도

배관상세도	위치도

□ 단수소요시간

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	16분	① 중간제수변(스텐) : 200㎜ 개→폐(2분), 폐→개(2분)
		② 분기제수변(소프트) : 100㎜ 개→폐(2분), 폐→개(2분)
		③ 인입제수변(스텐) : 80㎜ 개→폐(2분), 폐→개(2분)
		④ 중간제수변(스텐) : 200㎜ 개→폐(2분), 폐→개(2분)
퇴 수	3분	① 소화전밸브 : 100㎜ (3분)
배관	20분	① 이형관 및 소화전 접합 : 20분 - 이형관부설(3개소) : 15분 - 소화전부설(1개소) : 5분
제수밸브설치	10분	① 소프트밸브(신설) : 100㎜ (10분)
세척 및 통수	10분	① 소화전 : 100㎜ (10분)
합 계	59~60분

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	2F단관	100	개	2
2	소화전곡관	100X90	개	2
3	제수변(소프트)	100	개	1

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호우	0.12W	대	1
2	양수기	50~100㎜	대	2

□ 인력확보계획

연번	구분	성명	자격	인원수	비고
계				3
*	***	*******	*****	**

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

○ 수계조정 계획 : 해당없음

○ 퇴수작업 계획

******************************************

**************************

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	********************************** *******************************	********* *************
업 체	************* ************ ************	*************

□ 시험굴착계획 : 해당없음

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

○ 공사안내간판, 현수막

○ 휀스, 유도등

○ 교통안내원 배치등

□ 기타사항

○ 단수일시 : 2019. 8. 06.(월)

○ 단수시간 : 14:00 ~ 15:00

○ 단수지역 : ***************

○ 단수세대 : ****

단수 및 통수시 변류 조절계획

□ 조절대상 및 담당자

〇 단  수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	*********	***	*	****	*******
	2	*********	***	*	****	*******
	3	*********	**	*	****	*******
	4	*********	***	*	****	*******

〇 통  수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	*********	***	*	****	*******
	2	*********	***	*	****	*******
	3	*********	**	*	****	*******
	4	*********	***	*	****	*******
소화전밸브	5	*********	***	*	*********	*******

밸브조절 위치도

붙 임 : 단수 홍보 안내문 1부.  끝.