문서번호	운영총괄과-3893
결재일자	2019.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영총괄과장	운영부장
문상규		代문상규	08/05 송영민
협조
	주무관		김일환

한남대교 K-POP 체험관 경과보고

2019.8.

한강사업본부

(운영총괄과)

한남대교 K-POP 체험관 경과보고

행복플러스가게로 운영이 중단된 「한남대교 전망카페」를 (사)한국음반산업협회에서 「K-POP 체험관」활용하는 방안을 제시하여 민관협력을 통해  리모델링 후 개관을 준비하는 내용을 보고드림

□ 시설현황

○ 위    치 : 한남대교 남단 (강남구 압구정동 386-1)

○ 조성시기 : 2019. 8. 개장예정

○ 규    모 : 건축규모-163.6㎡(총 4층), 카페내부 76.4㎡(3,4층)

○ 준 공 일 : ’09.3.31.

○ 운영경과 : 장애인복지과에서 ’18.7.23.자로 시설 반납

운영기관	기간	용도
장애인복지과	’12.7.1.~’18.7.23.	행복플러스가게 운영(장애인 바리스타 고용,장애인 생산품 판매장)
서울관광마케팅(주)	’09.7.1.∼’12.6.30.	전망카페

※ 수요조회를 2회하였으나 신청자 없었음(서울시 부서, 자치구, 교육청 등)

□ 제안개요

○ 제안기관 : (사)한국음반산업협회(회장 직무대행 이덕요)

○ 제안내용 : 한남대교 전망카페를 K-POP 전시·체험관으로 활용

- 사회공헌 사업의 일환으로 K-POP 정보를 시민·외국인 관광객에게 문화공간 제공 희망

- ‘서울’, ‘한강의 기적’, ‘대중음악’을 연계한 시민 문화공간 조성

- 시설물 사용 승인 및 운영·관리 인력 지원, 한강관련 자료 요청

□ 추진내용

○ 업무협약체결(2019.3.9.) : 한강사업본부, (사)한국음반산업협회

○ 업무구분 : 기본시설 정비(한강사업본부), 체험장 구성·운영(협회)

- 기본시설 정비(한강사업본부)

· 시설보수 : 상·하수도, 오배수관, 방수시공, 전력설비, 도색 등

· 기타설비 : 자동문 교체, 냉난방 설비, 안내표시, 소방/조명 설비 등

- 체험장 구성·프로그램 운영(한국음반산업협회)

· 서울의 과거, 현재 사진과 K-POP 역사 등 홍보 공간 조성

· 대중음악 기획 전시(사진, 음반, 음반사진, 브로마이드, 뮤직비디오 등 활용)

· 오픈형 인터넷 방송 스튜디오(1인 창작자 & 유튜브 크리에이터 창작 공간)

- 시행방법: 서울시의 승인을 받아 공간구성(협회 책임시공)

□ 주요추진 경과

○ 관리인력 배치(’19.7.26) : 협회직원 파견 1명

※ 체험프로그램 기획 및 운영, 개장준비, 업무보조 아르바이트 1명 배치(협회부담)

○ 공사추진 현황

- 기본시설공사 마무리(본부) : 2019.8.7.

○ 개장준비 현황

- 내부인테리어공사 완료(협회) : 8.10.

- KMDC-A : K-POP 최신 음반 입고(~8.12.)

- K-POP HRS : 방송용 컴퓨터, 방송조명, 카메라, 스피커 등 입고(~8.14)

※ 시범 운영 후 음악 진화적 인테리어 소품 배치

- K-POP WSR : 윈도우 맵핑쇼 컴퓨터, 프로젝트 설치, 특수필름 시공(~8.19.)

※ K-POP 영상으로 시범 운영, 시민창작영상 송출 가능 테스트(이용방법 등 점검)

□ 홍보계획

○ 설비 테스트 운영 후(약 1주일 소요 예상) : 협의하여 오픈식 준비

- ’19.8월말 오픈예정

○ 온라인 홍보 계획(지속)

- 시민참여공간 홍보 게시판, 예약 게시판, 각종 정보제공 및 이벤트 등

- 각종 SNS(인스타그램, 페이스북 등) 이벤트

※ 해시태그 활용 K-POP 최신음반 기념품 이벤트 등, 대중음악/저작권 관련 리플릿(기념품) 등

- 협회 유튜브 채널 영상 홍보

※ 탐방기 영상, 체험기 영상, 재능기부 BJ 섭외

- 언론 보도자료 준비

※ 리뉴얼 과정, 목적과 취지, 앞으로의 방향과 시민참여의 독려를 주제로 칼럼 형태(2~3회)

○ 오프라인 홍보 계획

- 협회 6,000여개 음반제작자

- 유관단체, 관련 공공기관 홍보 협조 요청

□ 향후계획

○ 체험관 시범운영 : 2019. 8월말까지

○ 체험관 정식개관 : 2019. 9월