문서번호	물재생계획과-10751
결재일자	2019.8.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
김민석	김준형	하상문		08/05 이정화
협 조
	하수정비팀장		이두환
	하수설계팀장		강철규

「소구역 하수관로 정비사업」

기 술 용 역  시 행 계 획

2019. 8.

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□	안전, 생활환경개선
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□	환경보전
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「소구역 하수관로 정비 사업」

기  술  용  역   시  행  계  획

‘19년 1차 추경예산에 반영된 소구역 하수관로 정비사업의 설계용역 발주방안(입찰 방법 및 시행방법 등)에 대한 검토 보고임

1		추진근거

○ 2030 하수도정비 기본계획(환경부 승인 ‘18.01.22.)

- 배수분구 단위 정비를 배출 토구 중심의 소구역 단위로 사업정비 단위 개편

○ 토구별 소구역 정비사업 추진계획(물재생계획과-5515, ’19.04.16.)

- 3개 소구역 정비사업(중곡-1, 면목3-5, 장위4) 추진 ⇒ ‘19년 추경사업으로 설계비 반영

2		용역개요

○ 용역현황

(단위 : 백만원)

* 기술용역 타당성 심사 금액임(19. 6. 20 기심 심사완료)

연번	용 역 명	설계금액*	‘19년 예산(추경)	‘20년 이후	비고 (용역기간)
	합 계	5,743	1,500	4,243
1	장위-4 소구역 하수관로 정비 사업 기본 및 실시설계 용역	1,855	500	1,355	착수일로부터 18개월
2	중곡-1 소구역 하수관로 정비 사업 기본 및 실시설계 용역	1,928	500	1,428
3	면목3-5 소구역 하수관로 정비 사업 기본 및 실시설계 용역	1,960	500	1,460

○ 주요내용

- 토구중심의 유역관리를 통한 하수도관리의 효율성 증대

- 통수능 부족, 노후 불량관로 지속 정비로 하수관로 기능 회복 및 구조적 상태 개선 ⇒ 침수피해 및 도로함몰 예방으로 안전한 도시 생활환경 구축

- 사업 지역의 수세변소수 직투입도 가능한 수준으로 관로 정비방안 수립

3		추진경위

○′19. 4. 16     토구별 소구역 정비사업 추진 계획 수립

○′19. 6. 10     기술용역 타당성심사 요청(물재생계획과 → 기술심사담당관)

○′19. 6. 20     기술용역 타당성결과 통보(심사결과 : 적정)

○′19. 7. 19     용역 발주심의 의뢰 (물재생계획과 → 기술심사담당관)

○′19. 7. 24     용역 발주심의 결과 통보(심의결과 : 조건부 채택)

→ 심의의결사항 조치결과 제출(7.25)

4		시행계획

○ 관련근거(사업수행능력평가 및 낙찰자 결정)

-「건설기술 진흥법」제35조, 동법 시행령 제52조

-「지방자치단체 입찰시 낙찰자결정기준」(행정안전부 예규 제48호, 2018.11.8.)

○ 추진방법 : 건설기술용역

○ 입찰방법 : 일반입찰(장기계속계약)

○ 시행방법(낙찰자결정) : ************************

- 진행 중인 수색일대, 군자-2 소블럭 정비 시범사업과 연계하여 추진

****************

**************************************

*********************************************************************************

**********************************************************************************************

*******************************************************************************************

○ 용역수행자 선정절차

****	*******	******* ************	*******	********	*******	**** *******	*******	****
*****		*************		********		*****		*****

**************************************************************************************

*****************************************************************

○ 입찰참가자격(안)

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************

************************************************************************************************

****************************************************

5		향후계획

○′19. 8.      사업수행능력 세부평가기준 협의(물재생계획과 → 기술심사담당관)

○′19. 8.      일상감사의뢰(물재생계획과 → 안전감사담당관)

○′19. 8~9.   용역 발주 및 착수

붙임   1. 과업내용서 각 1부.

2. 설계내역서 각 1부.

3. 서울특별시 건설기술용역업자 사업수행능력 세부평가기준 1부.  끝.