투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	기전과 사무실 확장 전기공사 준공기한 연기 의뢰

1. 관리단속과-5907(2019. 6. 11.) 및 기전과-7569(2019. 8. 05.)호와 관련입니다.

2. 기전과 사무실 확장 전기공사 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다

가. 계 약 명 :  기전과 사무실 확장 전기공사

나. 계 약 자 : ******************

다. 계약금액 : ****************************

라. 준공기한 연기일자

*************************************

*****************************************

마. 연기사유

- 장마 및 집중호우로 공사기간이 절대적으로 부족하여 준공기한 연기

바. 연기사유 귀책소재 : 발주기관

사. 지체상금 부과여부 : 미 부과

붙임  1. 공사준공기한 연장 검토보고서 1부

2. 합의각서 1부

3. 공사 준공기한 연장의뢰서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	김흥식		기전과장	08/06 서승완
협조자
시행	기전과-7595	(		)	접수		(		)
우	07520	서울 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7932	/전송	02-2657-7939	/	san299@seoul.go.kr	/	부분공개(5)