문서번호	기전과-7614
결재일자	2019.8.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
김흥식		서승완	08/06 代박종윤
협조

기전과 사무실 확장 건축공사 준공기한 연기 검토보고

2019. 08.

강서도로사업소

(기전과)

기전과 사무실 확장 건축공사 준공기한 연기 검토 보고

기전과 사무실 확장 공사의 절대공기 부족으로 준공기한을 연기하여

안전한 공사수행에 만전을 기하고자 합니다

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 기전과 사무실 건축 건축공사

○ 계약금액 : ******************************

○ 계약일자 : 2019. 06. 11.

○ 착공일자 : 2019. 06. 18.

○ 준공기한 : 2019. 08. 16.

○ 공사내용 : 철근콘크리트, 철골, 지붕,금속, 창호, 수장공사 등

○ 계약업체 :**************

□ 준공기한 연기내용

○ 연기내용 : 당초 2019년 8월 16일(금)에서 2019년 8월 30일(금)까지 연기

○ 연기사유 귀책소재 : 발주기관

○ 지체상금부과여부 : 미부과

○ 연기사유 : 여름철 장마 및 집중호우로 인하여 공사수행에 어려움이 발생되었으며 절대 공사기간 부족으로 안전한 공사수행을 위하여 공사에 소요되는 최소한의 기간이 필요하다고 사료됨에 따라 공사기한을 연기하여 과업수행에 만전을 기하고자 합니다.

□ 행정사항

○ 변경계약 의뢰(관리단속과) : 방침즉시.  끝.