문서번호	거점성장추진단-508
결재일자	2019.8.6.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		산업거점개발팀장	산업거점활성화반장
최소영		송홍규	08/06 정덕영
협조
	★주무관		양동진

- G밸리 문화․복지센터 조성사업-

연차별 투자계획 보고

2019. 8.

경제정책실

(거점성장추진단)

-G밸리 문화․복지센터 조성사업-

연차별 투자계획 보고

G밸리 문화․복지센터 조성사업에 대한 연차별 투자예산을 편성하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 금천구 가산동 345-58외 2필지(1,149㎡)

○ 건축규모 : 지하 2층/지상 10층, 연면적 6,017㎡

○ 도입시설 : 근로자기숙사, 청소년쉼터, 무중력지대, IoT 기술지원센터 등

○ 공사기간 : 2017. 11.~ 2020. 7.(현 공정률 32%)

○ 총사업비 : **************************************

□ 추진경위

○ 산업단지 편의시설 확충사업 공모(산자부) 선정     : ’14.11.

※ 기숙사 건립 조건으로 국비 20억원 지원

○ 타당성조사 및 기본계획 수립 용역                 : ’15.4~8.

○ 기본 및 실시설계(현상설계 공모 ’16.6.~9.)        : ’16.10.~’17.9.

○ 건축공사 발주 및 계약	: ’17.10.~11.

○ 건축공사 착공(기존건축물 철거 등)	: ’18.3.

□ 연차별 투자계획

○ 2020년도 사업예산

*****************************************************

(단위:백만원)

구 분		2020년 예산	비 고
*		*****
***	************	*****	*******
	*************	***	******
	**	***	******
	**	**	*******
	*******	**	***
***		***	********
*****		**	*****

※ 예산산출 근거: ’20년 설계 내역서 참조(붙임)

○ 연차별 투자 사업비 세부내역

구 분		계	2015	2016	2017	2018	2019	2020
계		******	**	*****	*****	*****	*****	*****
시설비	공사비	******	*	*	*****	*****	*****	*****
	설계비	***	*	***	***	*	*	*
	폐기물처리 용역비	***	*	*	*	**	**	**
	석면조사 및 해체	**	*	*	*	**	*	*
	사업타당성 조사	**	**	*	*	*	*	*
	계	******	**	***	*****	*****	*****	*****
감리비	건설사업관리 용역비	*****	*	*	*	***	***	***
시 설 부대비	회의수당, 수수료 등	***	*	*	**	**	**	**
기 타	토지매입비	*****	*	*****	*	*	*	*
	토지 감정평가비	*	*	*	*	*	*	*
	계	*****		*****
재원별	계	******	**	*****	*****	*****	*****	*****
	국 비	*****	*	**	*****	*	*	*
	시 비	******	**	*****	***	*****	*****	*****

□ 향후 계획

○  ’20.  7.    :  공사 준공 ************************

※ 붙   임 : 2020년 설계내역서 1부.  끝.