문서번호	조경과-11414
결재일자	2019.8.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
강정호		석승우	08/06 문길동
협조

- 2019년 생활주변 자투리땅 녹화사업 –

대상지 변경 요청에 대한 검토보고

2019. 08.

푸른도시국

(조 경 과)

- 2019년 생활주변 자투리땅 녹화사업 -

대상지 변경 요청에 대한 검토보고

2019년 생활주변 자투리땅 녹화사업과 관련하여 성동구에서 대상지 변경 승인요청이 있어 검토보고 드림.

1		사업개요

❍ 사 업 명 : 2019년 생활주변 자투리땅 녹화사업

❍ 대 상 지 : 종로구 삼청동 157-17 등 4개소

❍ 규    모 : 685㎡

❍ 사업기간 : 2019. 01. ~ 10.

❍ 사업내용 : 꽃, 유실수 등 수목식재, 쉼터조성 등

❍ 사 업 비 : 135백만원

2		사업대상지 변경

❍ 사업기관 : 성동구 공원녹지과

❍ 요청사항 : 대상지 변경에 따른 승인

구분	당초	변경	비고
위치	성동구 성수동1가 685-699	성동구 성수동1가 656-853	1개소 변경
규모	27㎡	56㎡
사업비	30백만원

❍ 변경 대상지 위치도 및 현황사진

위치도	현황사진

❍ 자치구 의견

- 당초 대상지인 성수동1가 685-699(27㎡)는 ‘도시관리계획시설 뚝섬 광장(2) 조성’에 포함된 필지로서, 추후 사업이 예정되어 있어 대상지 변경 필요

- 변경 대상지인 성수동1가 656-853(56㎡)은 현재 자율방범대 및 새마을지도자 협의회 가건축물이 위치하고 있으나, 금년도 8월 중 철거 예정이며 생활권 주변 부족한 녹지량을 확충하고 경관개선에 기여

3		검토결과

❍ 대상지 변경 승인

- 총사업비 변경이 없는 범위 내에서, 변경 대상지는 선정기준 및 사업취지에 적합함에 따라 대상지 변경하여 사업추진

4		행정사항

❍ 대상지 변경 승인 통보(시 → 성동구)

붙임 : 1. 대상지 변경 승인요청 공문 1부.
2. 대상지 변경 검토보고(자치구) 1부.  끝.