“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	한강교량 보수보강공사 책임건설사업관리기술자
(경유)
제목	실정보고(차량방호울타리 기초규격 및 설치연장 변경) 승인 알림

1. 동성한강2019-274호(2019.08.02.) 실정보고와 관련입니다.

2. 『2019년 천호대교 보수공사』실정보고(차량방호울타리 기초 규격 및 설치연장 변경)사항에 대하여 아래와 같이 승인하오니 향후 설계변경 등 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 승인내용

- 차량 방호울타리 기초폭은 현재 설치되어 있는 방호울타리 기초폭(B=500㎜)에 맞추어 변경 시행

- 보도 유효폭(1.5m) 확보가 어려운 구간(2구간)은 설치 구간에서 제외

- 작업시간 변경(야간 → 주간).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	장재연		강구조교량팀장	박찬규		교량안전과장	08/07 代박동욱
협조자
시행	교량안전과-13830	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-1962	/전송		/		/	대시민공개