문서번호	방재시설부-11738
결재일자	2019.8.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
차성민		조성만	08/07 이임섭
협 조

양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사

운동장 조성공사 실정보고 검토보고

2019.08.

도시기반시설본부

(방재시설부)

양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사

운동장 조성공사 실정보고 검토보고

『양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사』책임건설사업관리기술자로부터 생태체육공간 운동장 조성에 대한 실정보고 검토 결과를 보고드림.

[관련문서 : 양평1유건 제2019-211호(‘19.7.29) 운동장 조성공사 실정보고 및 신규 적용단가 협의율 조정요청]

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사(장기계속)

❍ 규    모 : CSOs저류조 Q=46,000㎥,건축,조경 1식

- 생태체육공간 운동장 조성(우레탄포장3,870.6㎡,측구배수로281m)

❍ 공사기간 : 2016.12.05.~2019.11.15.(전체)

2019.03.01.~2019.11.04.(3차)

❍ 도 급 비 : 총괄 20,653백만원(3차 4,119백만원)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 대우산업개발(주) 외 2개사/㈜경동엔지니어링 외 3개사

2		보고내용

1. 저류조 상부 생태체육시설 운동장 조성

가. 생태체육시설 추가 설치

<운동장 계획평면도>

- 영등포구청으로부터 저류조 상부 생태체육공간 운동장 조성 요청에 따라

실시설계가 완료되어 생태체육공간 운동장 조성 설계변경 요청

· 신규공종 : 우레탄 포장 3,870.6㎡, 측구배수로 281m

2. 공사비 검토

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
직 접 공 사 비	-	394,945,501	증)394,945,501
제 경 비	-	117,154,499	증)117,154,499
공 급 가 액	-	512,100,000	증)512,100,000
부 가 가 치 세	-	51,210,000	증)51,210,000
도 급 공 사 비	-	563,310,000	증)563,310,000
관급자재비	-	53,883,000	증)53,883,000
총 계		617,193,000	증)617,193,000

3		건설사업관리기술단 검토의견

❍ 영등포구청 요청으로 시행하는 생태체육공간 운동장 조성 공사로 설계변경 시행함이 타당한 것으로 사료됨

4		보고자 의견 및 조치계획

❍ 상기 검토의견과 같이 생태체육공간 운동장 조성공사에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되며

❍ 협의율 조정 결과(방재시설부-11597(2019.8.6.) 통보와 관련 공사비는 설계변경에 반영토록하고 실정보고 승인 통보코자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 공문 1부.  끝.