문서번호	세무과-17620
결재일자	2019.8.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		세무정보화팀장	세무과장
박경여		안효무	08/08 서문수
협조

「2019년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업」

월  간  보  고 (7월)

2019. 8

재무국

(세무과)

「2019년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업」

월  간  보  고 (7월)

세무종합시스템의 안정적 운영과 서비스 개선을 위해 추진하고 있는『2019년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 사업』의 7월중 주요 추진과업 내용과 8월중 추진계획에 대하여 보고함.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사업기간 : ‘19. 1. 1 ~ 12. 31

□ 계약업체(금액) : ㈜씨와이디 정보기술(1,439백만원)

□ 주요 사업내용

○ 응용프로그램 추가개발 및 기능개선

- 과세예고 자료관리 개선, 세무/세외 통합조회, 수납금액 자동대사 등

○ 응용프로그램 유지관리 및 운영

- 지방세 부과 징수업무 지원, 사용자 요구사항 반영 및 보완

- 시스템 운영 및 유지관리, 장애예방 및 장애발생에 대한 복구 등

○ 시스템 S/W 유지보수 및 기술지원

- S/W 정기점검 및 기술지원, 장애예방 및 장애발생에 대한 복구 등

Ⅱ		월간보고회의 개최

□ 일시 : `19. 8. 5.(월) 16:00

□ 장소 : 서소문별관 1동 9층 세무과 회의실

□ 참석 : 세무정보화팀 사업관련 담당자, 사업 수행사

□ 내용 : `19년 7월 과업진행 추진실적 및 8월 추진계획 등 보고

Ⅲ		주요과업 처리내용

□ 주요과업 추진실적

과업 구분			총 과업	완료과업			진행과업			잔여과업
				누적합계		7월 완료	합계	진행	지연
신규			5	2		0	3	3	0	0
보완			38	20		5	10	10	0	8
총계			43	22		5	13	13	0	8
유지관리 (운영지원)		중요	10	5		1	2	2	0	3
		상시	1,334	1,334		196	0	0	0	0
합계			1,344	1,339		197	2	2	0	3
7월 6개 과업 완료
					-MAR-003지방소득세(특별징수) N:M 자료의 대사 매핑 -MAR-009법인지방소득세 재무제표의 일괄다운 기능추가 -MAR-019[주민세]주민세 정기분 과세기준일 변경 -MAR-032[체납결손] 납세자 납부처리 개선 -MAR-033납세자 시효처리 개선 -CSR-007[자동차세] 장애등급폐지에 따른 변경
8월 14개 과업 진행
	-SFR-001[구제제도] 과세예고 관리기능 시범개발 -SFR-002[자동차세] 자동차세(주행분) 수시분 부과관리 개선 -SFR-005[총괄과세] 세외수입 정보 조회기능 개발 -MAR-007[지방소득세] 법인지방소득세 법인소득 과세정보 -MAR-011[지방소득세] 개인지방소득세(종합소득) 홈택스 전자납부번호 연계개선 -MAR-012[지방소득세] 개인지방소득세(종합소득) 신고서 서식단계별 등록관리 -MAR-017[담배소비세] 담배소비세 공제(환급)절차 개선 -MAR-021[재산세] 재산세 토지대장 정비(부동산종합공부시스템 연계 활용) -MAR-022[재산세] 재산세 건물토지대장 정비(임대주택자료(렌트홈)활용) -MAR-028[총괄과세] 총괄과세현황조회 조회기능 개선 -MAR-031[체납] 공매/경매/압류 등의 상태 변경 정보 체납/사건대장에 자동 반영 -MAR-037[시스템공통] 대외기관 수신자료 관리 -CSR-005[등록면허세] 수시분 조사서 서식 개선 및 전자결재 연동 -CSR-009[부동산취득세] 부동산취득세감면신청접수
8월 2개 과업 추가 진행 예정
	-MAR-013 [지방소득세] 개인지방소득세(종합소득) 수정신고 등록관리 개선 -MAR-020 [재산세] 재산세(건물/주택분) 통계관리

따로붙임 1. 2019년 세무종합시스템 운영 및 유지관리 월간보고서(7월)  1부.

※ 투입인력 임금지급확인 포함

2. 월간업무 추진현황 보고서(7월)  1부.

3. 주간업무 추진현황 보고서(26주~30주) 각 1부.

4. 사업추진 현황(일정 등) 1부.

5. 회의록 각 1부.

6. 산출물(MAR-003/009/019/032/033, CSR-007) 각 1부.  끝.