투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	하늘공원 메타세콰이어 산책로 연결공사 준공기한 연기 시행

시설과-1714(2019.8.8)호와 관련,『하늘공원 메타세콰이어 산책로 연결공사 』에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 하늘공원 메타세콰이어 산책로 연결공사

다. 계약금액 : 금11,600,000원(금일천일백육십만원)

라. 계약업체 : 아라조경(주) 대표 이 석 우

마. 준공기한

1) 당초 : 2019. 7. 29. ~ 8. 22.

2) 변경 : 2019. 7. 29. ~ 9. 10.

바. 연기사유 : 현장여건을 반영한 추가 공사시행에 따른 공기 부족

사. 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소(지연배상금 미부과)

붙임 1. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부

2. 검토 보고서 1부.  끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	홍성우		조경시설팀장	이용원		시설과장	문인기		서부공원녹지사업소장	08/08 代문인기
협조자	재무팀장	정동철
시행	시설과-1719	(		)	접수		(		)
우	03967	마포구 월드컵로 243-60(성산동)	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	300-5536	/전송	300-5569	/		/	부분공개(5)