문서번호	토목부-14267
결재일자	2019.8.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	08/08 김용제
협조

낙원상가 하부 공사와 관련 주민설명회 결과 보고

(창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 8.

도시기반시설본부

(토  목  부)

낙원상가 하부 공사와 관련 주민설명회 결과 보고

(창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업)

『창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업』의 낙원상가 하부 공사와 관련 낙원상가, 낙원아파트 대표와의 주민설명회 개최결과 보고임.

Ⅰ

사업개요

○  사 업 명 : 창덕궁앞 도성한복판 주요가로 개선사업

○  위    치 : 돈화문로 외 5개차로

○  규    모 : 가로개선(연장 2,400m, 폭1.5~22m)

	< 낙원상가 하부 >
낙원상가 하부 경관개선 : 주차구역 축소 및 보행공간 확보, 낙원생활문화지원센터 설치 등 주요공사 물량 : 아스콘 포장 48a, 보도부(T100) 석재포장 2,802㎡, 차도부(T150) 석재포장 280㎡

○  기    간 : 2018.12.26. ~ 2019.12.31.(착공일로부터 371일)

○  사 업 비 : 13,558백만원(도급비 6,725백만원)

Ⅱ

추진경위

○ ’18.11.30 : 공사발주(토목+조경)

○ ’18.12.19 : 공사 계약체결

○ ’19.05.10 : 공사이관 요청(구청장→역도과)

○ ’19.05.15 : 공사중단(업무지시, 낙원상가 하부구간 포함)

○ ’19.06.18 : 개선(안)에 대한 자체검토 결과 알림(구청→도기본)

○ ’19.06.20 : 구청요구 내용 알림(구청→역도과)

○ ’19.06.24 : 공사이행을 위한 합동회의(역도과)

○ ’19.07.23 : 공사 재개를 위한 합동회의(구청)

○ ’19.08.08 : 낙원상가, 낙원아파트 대표 주민설명회 실시

Ⅲ

설명회 결과

○ 일  시 : ’19. 8. 8.(목) 09:30 ~ 10:30

○ 장  소 : 낙원상가 4층 회의실

○ 참석자 : 16명

- 낙원상가 : 낙원아파트 주민자치회 대표 4명(강희경, 예찬건, 김완길, 최기명), 낙원상가번영회 유강회 회장, 동아서울시네마 양재걸 상무, 낙원상가주식회사 권수영 대표, 대일건설주식회사 박형철 전무

- 서 울 시 : 도기본 토목부 광역도로과장, 이성열 주무관, 건축부 정인호 주무관

- 종로구청 : 주거재생과장, 이경성 주무관

- 시공업체 등 : 토목 현장소장, 건축 현장소장, 낙원생활문화지원센터 센터장

○ 주요내용

- 공사로 인한 낙원상가 및 아파트에 소음, 진동 해소 방안 설명

⇒ 소음, 진동 최소화를 위하여 포장깨기 공법변경(기계깨기 → 평삭기+인력깨기)과 공사물량을 축소(양호한 기존판석포장 구간 깨기 제외 등)하여 시행할 예정

- 주차장 축소(운영 및 배정)에 대한 정확한 내용과 앵커 건축물의 시공 높이에 대한 설명

⇒ 주차장 축소(운영 및 배정) 및 건축 공사와 관련 설명회 개최

(’19. 8. 13(화), 종로구청 주거재생과 주재)

- 공사 중지로 낙원상가 및 아파트 주민에 불편이 가중되고 있으니 조속 공사재개 요청

⇒ 위 방법으로 공사를 시행하는 것에 대하여 낙원상가 및 아파트에서 공사재개에 찬성하므로 바로 시행하도록 하겠음.

Ⅳ

행정사항

○ 건설사업관리단 및 시공사에 낙원상가 하부 공사재개 업무지시

○ 포장깨기 공법변경 및 공사물량 축소 설계변경 실시.  끝.