문서번호	도로관리과-12775
결재일자	2019.8.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	포장조사평가팀장	도로관리과장	안전총괄관		안전총괄실장
박은민	백종은	代최연우	김홍길		08/09 代김홍길
협 조
	주무관			김원재

「2018년 도로포장 상태 조사 및 분석」준공 보고

2019. 08.

안전총괄실

【도로관리과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2018년 도로포장 상태 조사 및 분석 준공 보고

「2018년 도로포장 상태 조사 및 분석」용역이 완료되어 계약 상대자가 준공 신고서를 제출함에 따라 용역 준공사항을 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2018년 도로포장 상태 조사 및 분석

○ 용 역 비 : 1,212,532천원(금일십이억일천이백오십삼만이천원)

○ 용역기간 : 2018. 06. 25. ~ 2019. 07. 30.

○ 용역업체 : (주)로드텍, (사)한국도로학회

○ 과업내용

- 특별시도 포장상태 조사

- 도로포장 상태 조사자료 분석 및 평가

- 장기공용성 추적조사 및 D/B관리

- 서울형 우수 도로포장기술 발굴 체계 개발

- 최적보수공법 결정체계(D/T) 검증

- 도로포장공사 성능보증제 계약제도 적용성 연구

□ 추진경위

○ ’18. 06. : 용역 착수

○ ’18. 07. : 조사장비 정확성 및 신뢰성 평가

○ ’18. 10. : 1차 중간보고 및 자문회의

○ ’19. 01. : 2차 중간보고

○ ’19. 02. : 시험시공 연기로 인한 준공연기(당초 2.28. ⇒ 변경 7.30.)

○ ’19. 05. : 성능보증제 구간 시험시공 및 평가 분석

○ ’19. 07. : 용역 최종보고회

□ 준공내용

○ 특별시도 전수조사 및 분석(6,792km) 완료

- 서울시포장상태지수(SPI) : 6.64(`17년 대비 0.45 증가)

- 개별 결함량 : 균열률 6.2%, 소성변형 5.8mm, 종단평탄성 3.4m/km

- 불량구간(SPI 6 미만) : 30.8%(`17년 대비 9.1% 감소)

○ 장기공용성 구간 평가 완료

- 포장설계법 구간 : 서울형포장설계 적용 구간의 공용수명 향상

- 고내구성 구간 : 섬유그리드 적용 구간의 공용성 우수

- 저소음포장 구간 : 공용기간에 따라 소음 증가, 소음저감효과 약 5년 유지

- 차열포장 구간 : 일반 아스팔트 포장 대비 3.2~6.8℃ 온도 저감

○ 서울형 우수 도로포장기술 발굴 체계 검토

- 서울시에 적합한 우수 도로기술 발굴체계 및 세부절차 개선(안) 제시

서울형 우수 도로포장기술 발굴 체계(안)

안내 및 접수	⇒	사전 검토	⇒	심의위원회 개최	⇒	시험시공 계획

시험시공 평가	⇒	중(장)기 공용성 평가	⇒	평가위원회 개최	⇒	기술 등록

○ 최적보수공법결정체계 검증

- 현장조사 및 코어채취를 통해 보수공법결정체계 검증 및 개선(안) 도출

○ 도로포장공사 성능보증 계약제도 적용성 방안 연구

- 성능보증 계약제도 적용을 위한 타당성 검토 및 준공금 감액요율 결정

- 시험시공 구간 성능품질 평가

□ 보고자 의견

○ 계약기간 내 모든 과업을 완료하였기에 준공처리 하고자 함

붙임  준공신고서 1부.  끝.