문서번호	기반시설과-2468
결재일자	2019.8.9.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
임영준		라철흠	08/09 전영주
협조

『월드컵분수대 이전 설치공사』

세부일정 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  8.

한강사업본부 시설부

(기반시설과)

『월드컵분수대 이전 설치공사』

세부일정 및 조치계획 보고

월드컵분수대 이동에 따른 세부일정 및 조치계획을 수립·보고하여 안전한 공사시행 및 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

□『월드컵분수 이전 설치공사』집행계획(기반시설과-1177,2019.4.29.)

□『월드컵분수 이전 설치공사』시행 및 계약의뢰(기반시설과-1199,2019.4.30.)

□ 공사시행에 따른 사전 관련자 회의(1차,2019.7.11.)

○ 계약업체(합동종합건설), 검사업체(케이알엔지니어링), 담당자

- 앵커, 체인 제작 철저, 반입시 검수, 세부일정 및 안전관리대책 수립

□ 공사시행에 따른 현장점검 및 관련자 회의(2차,2019.8.13.)

○ 계약업체(합동종합건설), 담당자

- 씽커, 앵커, 체인 반입확인, 세부일정 협의, 안전관리 지시

2		공사개요

□ 공 사 명 : 월드컵분수 이전 설치 공사

□ 공사기간 : 2019.5.21. ~ 8.26.

□ 공사내용

○ 성산대교에서 신행주대교 남단으로 이전, 계류선 설치

○ 펌프스크린(2개), 외부조명등(2개), 케이블브이(1대), 외부전력선(100m)철거

○ 씽커제작(2개), 앵커(2개) 및 체인(330m)구매

○ 조명탑(1개), 수중케이블(454m)철거

□ 계약업체 : ㈜합동종합건설 대표 ***

□ 계약금액 : 200,000,000원

3		세부일정 및 조치계획

일 시	세 부 일 정	조 치 계 획	비 고
‘19.8.7 ~ 8.9.	· 체인(26mm),앵커(5톤) 추가설치하여 홍수대비 사전 보강조치 완료 · 외부조명등, 케이블브이,외부전력선 철거완료 · 신규 앵커, 체인, 씽커 제작 · 이동항로 사전 점검	· 관련부서(수상안전과)에 이전 안내 · 시공업체에 실정보고 징구 및 안전관리 공문시행 -『한강수난사고 매뉴얼』 안내
8.12 ~ 13	· 기존 체인, 앵커 철거 · 신행주대교 남단 이전 · 잔류시설(조명탑) 안전조치	· 작업자 안전교육 일지 및 작업일지 징구 · ㈜케이알엔지니어링에 계류 안전도검사 조치 - 검사결과보고서 징구
8.14 ~ 16	· 계류시설 설치
8.16 ~ 19	· 잔류시설(조명탑 및 수중케이블) 철거

※ 세부일정은 기상상태에 따라 안전를 고려 변경가능

4		향 후 계 획

□ 2019.8.26일이내 : 조명탑·수중케이블 철거 및 분수대 이동 조치 완료

□ 2019. 9월 ~ : 이동 분수대 안정화를 위한 점검용역 실시

붙임 : 1. 안전교육 및 작업일지 양식 1부.

2. 한강수난사고 행동매뉴얼(발췌) 1부.

3. 이동항로 사전 점검 결과 1부. 끝.