투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청(방호울타리 알루미늄제 교량난간 구매)

1. 관리단속과-8691(2019.7.16.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여, 관급자재 납품기한을 연기 요청하오니, 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 방호울타리 알루미늄제 교량난간 구매

나. 금    액 : 금157,156,080원(조달수수료 포함)

다. 납품요구번호 : 12-19-1-63962-00

라. 변경사유 : 도로시설물 일상유지보수공사 시공 일정 변경으로 인한, 관급자재 납품기한 연기

마. 변경내용(제1회) : 납품기한 연기

- 당초 : 2019. 7. 15. ~ 2019. 8. 14.

- 변경 : 2019. 7. 15. ~ 2019. 10. 10.

붙임  관련공문 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	이상직		시설보수과장	08/09 代김영원
협조자
시행	시설보수과-6433	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5453	/전송	945-5073	/		/	대시민공개