문서번호	공원여가과-2259
결재일자	2019.8.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원여가과장	공원부장
임혜리		윤재한	08/12 김인숙
협조

『한강공원 체육시설주변 수벽조성사업』 설계변경 검토보고

2019. 8.

한강사업본부

(공원여가과)

『한강공원 체육시설주변 수벽조성사업』

설계변경 검토보고

『한강공원 체육시설주변 수벽조성사업』과 관련하여 현장여건 반영에 따른 설계변경 사항을 검토하고 다음과 같이 보고합니다.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 한강공원 체육시설주변 수벽조성사업

□ 위    치 : 잠실한강공원 등 4개소

□ 공사내용 : 수목식재

□ 공사기간 : 2019. 7. 15. ~ 9. 12.

□ 도 급 비 : 금94,846,340원

□ 도급업체 : 주식회사 주호조경 대표 이옥순

2		설계변경 및 준공정산 검토내용

□ 주요 변경내용

구 분	현황 및 변경내용	검토 결과
식재공	▶ 현장여건에 맞춘 수목 수량 변경	▶ 황금사철(H1.0*W0.3) : 당초 2,120주 → 변경 1,175주 ▶ 남천(H1.0*3가지) : 당초 480주 → 변경 0주 ▶ 사철나무(H1.0*W0.3) : 당초 3,390주 → 변경 6,195주 ▶ 줄사철(8cm) : 당초 680주 → 변경 0주
경비정산	▶ 4대보험 및 경비 정산

□ 소요예산

구 분	금액(원)			비고
	당 초	변 경	증 감
총 공 사 비	96,917,340	88,526,000	감8,391,340
도 급 비	94,846,340	86,455,000	감8,391,340
공급가액	86,223,945	78,595,455	감7,628,490
부 가 세	8,622,395	7,859,545	감762,850
관급자재	2,071,000	2,071,000	-

□ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선,

한강공원이용시설유지관리, 시설비

3		검토의견

□ 현장여건을 반영하여 설계변경하고자 함.

붙  임 1. 변경내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.