문서번호	치수과-12588
결재일자	2019.8.12.
공개여부	대시민공개

주무관	치수담당	치수과장	안전건설교통국장
윤형철	김재준	김윤기	08/12 하순호
협 조
	기전관리담당			유태상

2020년 하천사업 시비 예산확보 계획

2019. 8.

안전건설교통국

(치     수     과)

2020년 하천사업 시비 예산확보 계획

관내 하천의 방재 능력을 향상하고 하천 시설물의 효율적인 관리를 위해 2020년 정비가 필요한 하천 사업과 관련하여 예산(시비) 확보 계획을 보고함

Ⅰ		관 련 근 거

하천법 제27조(하천관리청의 하천공사 및 유지보수)

Ⅱ		사 업 현 황

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	소요예산	비 고
1	우이천 복개구간 복원화 사업	1,500	2019년 1,100백만원 기확보
2	정릉천 제방(석축) 보수공사	500
3	우이천 자전거도로 및 산책로 정비공사	500
4	정릉천 산책로 노후 조명시설 정비	150
5	하천 진출입 차단시설 설치	320
합계		2,970

Ⅲ		세 부 사 업 계 획

우이천 복개구간 복원화 사업

○ 사업위치 : 성북구 한천로 695 일대 (장월교 ~ 벼루말교)

○ 공사내용 및 사업규모 :

- 우이천 반복개 구조물 철거 및 자연형 제방 조성

- 폭원(B)=18~20m, 연장(L)=340m

○ 공사기간 : 2019. 10. ~ 2020. 5.

○ 총사업비 : 2,600백만원(기확보 1,100백만원, 2020년 1,500백만원)

정릉천 제방(석축) 보수공사

○ 사업위치 : 성북구 정릉천 상류 전구간

○ 공사내용 및 사업규모 :

- 석축 천단보수 : L=500m

- 석축 줄눈제거 및 보수 : L=2,500m

○ 공사기간 : 2020. 3. ~ 2020. 12.

○ 총사업비 : 500백만원

우이천 자전거도로 및 산책로 정비공사

○ 사업위치 : 월계2교 ~ 석계역 복개시점

○ 공사내용 및 사업규모 :

- 퇴적토 준설 : V=180㎥

- 자전거도로 보수 : B=4m, L=800m

- 산책로조성 : B=1.5m, L=600m

○ 공사기간 : 2020. 3. ~ 2020. 12.

○ 총사업비 : 500백만원

정릉천 산책로 노후 조명시설 정비

○ 사업위치 : 정릉천 하류(샹그레빌 아파트 ~ 종암대교)

○ 공사내용 및 사업규모 :

- 투광등기구 교체 : N=51등

- 등주설치 : N=40본

- 노후선로교체 : L=1,100m

○ 공사기간 : 2020. 3. ~ 2020. 6.

○ 총사업비 : 150백만원

하천 진출입 차단시설 설치

○ 사업위치 : 성북천 13개소

○ 공사내용 및 사업규모 :

- 출입차단기 : N=13개소

○ 공사기간 : 2020. 3. ~ 2020. 6.

○ 총사업비 : 320백만원

Ⅳ		기 대 효 과

우이천 노후 복개구조물 철거 후 자연형 제방 조성 등 하천 시설물을 적기에 보수·보강하여 치수능력을 향상하고 하천을 이용하는 주민들에게 쾌적한 친수공간 제공

Ⅴ		향 후 계 획

상기 시비요청 사업들에 대하여 최우선적으로 예산이 반영될 수 있도록 주관부서인 서울시 하천관리과와 긴밀히 협의하고자 함

따로 붙임 : 사업설명서 각 1부.  끝.