투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(준공기한 연장 계약 체결 알림)

1.업무지시현장 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) (주)이수에이치앤씨, 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주식회사 선진엔지니어링종합건축사사무소, 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주식회사 유신

2.작 성 일 자 : 2019-08-13 10:08:30

3.지 시 내 용

가. 탄천하감 2019-252(2019.07.25.)호와 관련입니다.

나.「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(1차)」의 준공기한 연장 요청에 대하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리오니 공사장 공정관리 및 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 계약기간

- 변경전[1차: 2019.08.31 총차 : 2020.02.03] 변경후[1차: 2019.12.31 총차 : 변경없음]

※ 총차 및 1차 계약금액 변경내용 없음

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							최대진			열빛총괄과장					08/13 여인웅
협조자
시행			설비부-12368									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8610						/전송			02-3708-8659					/	djdj3763@seoul.go.kr												/	부분공개(5)