문서번호	토목부-14513
결재일자	2019.8.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
배원영	김동현	김용제		08/13 김승원
협 조

- 헌릉로 확장 기본 및 실시설계 용역 -

노선선정(안) 자문회의 개최 결과 보고

2019. 8.

도시기반시설본부

토목부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

- 헌릉로 확장 기본 및 실시설계 용역 -

노선선정(안) 자문회의 개최 결과 보고

『헌릉로 확장 기본 및 실시설계용역』중 시공성 및 경제성을 감안한 실시설계 최적 노선을 결정하기 위한 노선확정 자문회의 결과 보고임

□ 용역개요

❍ 위    치 : 내곡IC(서초 내곡동)~헌릉IC(강남 세곡동)

❍ 용역규모 : 도로확장 6차로 → 10차로 L=1.3km, 연결로 신설 L=0.5km 등

❍ 용역기간 : ‘19. 3. 25. ~ ‘19. 12. 24.

❍ 총용역비 : 682백만원

❍ 설 계 사 : ㈜삼안, ㈜에이스톤엔지니어링

□ 자문회의 개요

❍ 건  명 : 노선선정(안) 자문회의

❍ 일  시 : 2019. 8. 8(목) 14:00~16:00

❍ 장  소 : 도시기반시설본부 11층 대회의실

❍ 참석자 : 시설국장외 7명

※ 간사 : 토목설계과장,   배석자 : 각 과 업무담당 및 서초구 교통실장 등

분 야		소속 및 직위	위원명
위원장		시 설 국 장	김승원
외 부	도 로	인덕대학교 교수	이상염
	교 통	㈜이산 상무	고주연
	토목구조	㈜한국종합기술 상무	원종진
내 부		토 목 부 장	김용제
		도로계획과장	代조용상
		교통운영과장	代류춘광
		서초구 안전건설교통국장	이순명

❍ 보 고 자 : ㈜삼안 이종철 전무이사

□ 주요자문 내용 및 조치계획

❍ 자문요청 사항

1)헌릉로 확장방안

구분	타당성조사(안)	비교1(안)	비교2(안)
개 요	▪본선 전구간 10차로 ▪헌릉교 양측확장 ▪헌릉 IC구간 편측확장	▪본선10차로 확보 및 헌릉IC유출-유입구간 8차로 ▪헌릉교 양측확장 ▪헌릉IC 구간 우측확장	▪본선 전구간 10차로 ▪헌릉교 양측확장 ▪헌릉 IC구간 우측확장
사업비	232.5억원	193.2억원	331.1억원
장단점	▪기존 헌릉교 철거 및 양측확장 재설치 ▪기존 헌릉IC 유지 ▪세곡천 이설, 헌인교 재설치 등 ▪공사중 교통전환 1개소	▪기존 헌릉교 철거 및 편측확장 재설치, 보도데크 설치 ▪기존 헌릉IC 유지 ▪세곡천 미저촉, 헌인교 존치 ▪공사중 교통전환 1개소	▪기존 헌릉교 철거 및 양측확장 재설치 ▪기존 헌릉IC 변경과다 ▪세곡천 미저촉, 헌인교 존치 ▪공사중 교통전환 2개소

2)내곡IC 연결로 신설

구분	타당성조사(안)	비교1(안)	비교2(안)
개 요	▪분당→양재방향 기존2차로 연결로유지 ▪가속차로 3단 설치	▪내곡IC이용후 예비군훈련장 교차로에 개포→양재방향 추가연결로 설치 ▪기존 교차로 이용 좌회전	▪분당→양재 기존연결로 내 1차로 축소 ▪가속차로 2단 설치
사업비	71.8억원	2.4억원	44.3억원
장단점	▪우회가 없어 교통편의 증대 ▪가속차로 연장과다 ▪내곡보도육교 저촉 및 확장 ▪샘마을 및 종교시설 부지 저촉 민원발생우려	▪기존 통행패턴 유지 ▪샘마을 평면교차로 간섭배제 ▪내곡IC 녹지대 활용 ▪우회거리 증가 L=1.8km	▪우회가 없어 교통편의 증대 ▪가속차로 연장최소 ▪내곡보도육교 미저촉 ▪샘마을 및 종교시설 부지 저촉 민원발생우려

※ 자문요청사항에 대해 용역사에서는 비교1(안)으로 추천

❍ 주요 자문의견 조치계획

- 자문의견 21건 중 자문회의 결과 반영 18건, 원안적용 3건(세부내용 별첨2 참조)

******	****	****	****
**** *****	*****************************************************************************************************************	*****************************************************	*****
**** *****	***************************************************************************************	*******************************************************************************	****
**** *****	******************************************************************	****************************************************************************	****
**** ******	*************************** ***************** **************	********************************************************************************** ****************************	****

❍ 위원장(시설국장) 의견

**************************************

****************************************

**************************************

□ 향후계획 및 행정사항

❍ 자문회의 결과를 설계용역자에게 통보하여 설계 보완 요청

❍ 서초구 의견사항에 대해선 세부적 검토 협의후(서초구 별도 공문시행) 도로계획과 의견 수렴하여 최종노선안 확정시행

❍ 외부자문수당은 용역사에서 지급하여 추후 정산 처리

- 외부위원 3명 × 150,000원 = 450천원

붙임 : 1. 자문의견서 1부

2. 자문의견서 조치계획 1부.

3. 자문회의 녹취록 정리 1부.

4. 자문회의 참석자 명단 1부.

5. 자문회의 사진 1부 끝.