문서번호	녹지관리과-2995
결재일자	2019.8.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
푸른광장팀장	녹지관리과장
송형래	08/13 권종화

서울광장 잔디 보식 세부계획

2019. 8.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

서울광장 잔디보식 세부계획

1		식재 개요 및 일정

□ 식재개요

○ 일    시 : 2019. 8. 19.(월) 08:00~17:00

※ 잔디식재 기반 정비 : 2019. 8. 16(금) 08:00 – 17:00

○ 장    소 : 서울광장 잔디광장(1,000㎡)

○ 방    법 : 직원 및 현장인력 활용, 직접 식재

○ 작업인원 : 40명 (서울광장반, 광화문광장반, 산림관리반 등)

□ 식재일정

【 8. 16(금)】: 폐잔디 제거 : 이상철, 모래 포설 : 김옥경

※ 작업 미완료 시 서울광장 휴일근무자(토 2명, 일2명)가 식재기반 정비 마무리

시 간	폐잔디 제거	모래 포설
07:00～08:00	▪폐잔디 제거 -서편(물놀이장)→분수대옆→동편 스프링쿨러 위 라바콘 설치 폐잔디를 톤백(100개)에 투입 ※ 동편 30개, 서편 70개 예상
08:00～11:00		▪모래 상차 (열린마당, 포크레인) ▪모래 이동 (열린마당 →서울광장) ※ 5톤 2대, 차량당 3회 운행 ▪모래 하역 - 분수대옆 2, 물놀이장 3, 동편1
12:00~13:00	▪점심 시간 (11:30~13:00) ▪톤백 이동(지게차, 12:00시작) ▪폐잔디 상차 (포크레인)	▪점심시간
13:00~14:00		▪포크레인으로 모래 분배 - 물놀이장 → 서편 느티나무앞 ※ 중앙은 직접 리어카로 운반 ▪작업자들이 모래 포설(2cm) - 포크레인으로 대략 정리 - 인력으로 구석 등 세부 정리
14:00~15:00	▪폐잔디 상차 완료 및 이동 - 운반차량 : 25톤 트럭 2대 - 서울광장→ 폐기물처리장
15:00~16:00
16:00~17:00
17:00~18:00	로프설치 및 그물망(초록색) 설치 작업 (서울광장반)

【 8. 19(월)】

※ 작업 미완료 시 다음날(’19.8.20) 작업 마무리 : 서울광장반(9명)

시 간	내 용	비 고
05:00～07:00	▪잔디 파레트(28개)하역 및 배치 - 광장 서편에 파레트 28개 하차 - 잔디식재지 주변으로 파레트 배치 - 동편으로 파레트 7개 이동	이상철 주임
08:00～08:30	▪작업 준비 (물품 지급, 작업안내 등)
08:30~11:30	▪잔디식재(50분) 및 휴식(10분)
11:30~13:00	▪점심
13:00~17:00	▪잔디식재(50분) 및 휴식(10분)
17:00~19:00	▪식재잔디 관수	장진영 등 4명

※ 서울광장 잔디보식 예정면적(안)

2		식재 장비 및 업무분장

□ 식재장비 및 소요물품

일자	장비명	규격	대수	임차시간	용도
’19.8.16	25톤 덤프트럭	앞사바리	2	10:00 – 15:00	폐잔디 운반
	5톤 트럭	앞사바리	2	08:00 – 12:00	모래 운반
	포크레인	6W	1	08:00 – 16:00	모래 상차/포설
	지게차	5톤	1	12:00 – 14:00	폐잔디 상차
	잔디제거장비		2		잔디제거
	리어카		2		모래운반
	톤백	500kg	100개
	그물망 및 로프
’19.8.19	지게차	5톤	1	06:00 – 07:00	잔디 하차
	2.5톤 트럭		1		폐잔디 운반
	리어카		2
	톤백	500kg	10개

□ 잔디식재 업무분장

구 분	성명	업무내용
총 괄	푸른광장팀장	잔디식재 실무 총괄
잔디식재기반정비 (8.16)	이상철	폐잔디 제거작업 총괄(오전)
	김옥경	모래 포설작업 총괄(하차위치 지정 등)
	나선경	모래 상차 지원(열린마당, 출입문 개폐 등)
	지원인력 (40명)	잔디 식재기반 정비 수행
	서울광장반	안전 로프 및 그물망 설치 등(17:00-18:00)
잔디식재 (8.19)	이상철	잔디식재 현장 총괄 (교육 및 작업지시 등)
	지원인력 (40명)	잔디 식재 및 운반, 이음새 정리 등
	장진영 반장 등 3명	관수(17:00-19:00)

□ 보식작업 완수를 위한 초과근무

일자	근무시간	근무자	업무내용
’19.8.16	17:00-18:00	서울광장반 전원	안전로프 및 그물망 설치 등
’19.8.19	17:00-19:00	장진영 등 4명	식재잔디 관수 등

붙 임 1		잔디 보식 작업관련 비상연락망

장비명	규격	업체	연락처
25톤 덤프트럭	앞사바리	***	*************
5톤 트럭	앞사바리	***	*************
포크레인	6W	******	*************
지게차	5톤	******	***********