문서번호	공원녹지정책과-15370
결재일자	2019.8.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
임성수	박미성	08/13 代김광덕

용마도시자연공원 조성계획변경

설계용역비 추가 요청에 따른 검토보고

2019. 8.

푸른도시국

공원녹지정책과

용마도시자연공원 조성계획변경

설계용역비 추가 요청에 따른 검토보고

제15차 시공원 보수정비 설계심의 지적사항 이행 관련 용마도시자연공원 조성계획변경을 위한 설계 용역비 추가 지원 요청에 대해 검토하고 아래와 같이 보고드림.

※ 추진근거 : 공원녹지정책과-13477호(2019.7.17.) “제15차 시공원 보수정비 설계심의 결과 알림”

중랑구 공원녹지과-14089호(‘19.8.9.) “시공원 보수정비사업 예산 재배정 요청”

□ 용역개요(추진중)

○ 용 역 명 : 용마폭포공원 체육시설 정비사업 실시설계용역

○ 용역기간 : 2019. 2. 12. ~ 11. 30.

○ 용역내용 : 용마폭포공원 내 노후 체육시설 정비 등 실시설계

○ 계약금액 : 14,660천원

□ 요청사유 및 추진계획

○ 2019.7.10. 제15차 시공원 보수정비 설계심의 결과 지적사항인 미반영 공원시설에 대한 공원조성계획 반영 필요(과업내용 추가로 설계 용역비 증액)

○ 도시공원위원회 심의 대상 및 경미한 변경대상을 구분, 해당 절차 이행 후 시공원 보수정비 설계심의 관련사항 별도 협의

□ 추가 용역비 산출(설계용역 변경)

○ 기본 및 실시설계 동시발주 요율 적용 : 용역 산출내역 별첨

구 분	용 역 비(원)			비 고
	변경전	변경후	증감액
공급가액	13,333,000	17,360,000	증 4,027,000
부 가 세	1,333,000	1,736,000	증 403,000
계	14,660,000	19,090,000	증 4,430,000

□ 검토의견

○ 공원조성계획 미반영 시설에 대해 현황에 맞게 공원조성계획을 변경 하고자 하는 사항으로 설계용역비 예산 재배정 조치하고자 함.

- 해당 사업인 용마폭포공원 체육시설 정비 예산 활용

□ 행정사항

○ 공원녹지정책과 : 공원조성계획 반영을 위한 추가 용역비 재배정

(공원녹지정책과 ⇒ 중랑구 공원녹지과)

○ 중랑구 공원녹지과 : 용역 설계변경 및 공원조성계획변경 추진 후 시공원 보수정비 설계심의 관련 사항 별도 협의

(중랑구 공원녹지과 ⇒ 공원녹지정책과)

○ 추가 소요예산 : 4,430천원(설계비)

- 예산과목 : 공원녹지정책과. 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원유지관리 및 보수정비, 시설비(205-401-01)

붙임 : 예산 재배정 요청공문 및 관련서류 각 1부.  끝.