문서번호	시설관리과-2250
결재일자	2019.8.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
박주형		한흥태	08/14 전영주
협 조
	총무과장			한정훈
	주무관			代김연배
	주무관			장연심

「한강공원 노후 자전거도로 정비공사」

설계변경 시행보고

2019. 8.

한강사업본부

(시설관리과)

「한강공원 노후 자전거도로 정비공사」

설계변경 시행보고

자전거 안전사고를 저감하고자 추진 중인 『한강공원 노후 자전거도로 정비공사』에 대하여 현장여건에 따른 일부 공종별 계약물량 및 도급비 변경에 따라 설계변경하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

1. 공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 한강공원 노후 자전거도로 정비공사

▢ 위    치

○ 광나루 한강공원(강동대교 남단, 구리암사대교 남단)

○ 잠원 한강공원(청담대교 남단 ~ 성수대교 남단)

▢ 공사기간 : 2019. 3. 18 ~ 9. 16.

▢ 규     모 : 경계석 설치 776m, 아스콘포장 305a, 차선도색 22,200m

▢ 사 업 비  : 565,056천원

○ 도급비 246,117천원, 관급비 282,445천원, 이전비 36,494천원

▢ 시 공 사 : 명운산업주식회사 대표 김경희

2. 변경사유 및 현황

▢ 주요변경내용

○ 공사현장 여건 등에 따른 신규공종 발생 및 공종별 물량 증·감

- 자전거도로 차선도색 우천형 정비(시설관리과-895)

: 야간 및 우천 시 시인성 향상으로 자전거도로 안전사고 예방

- 기타 수량정산 및 관급자재 변경

▢ 주요변경내용

공 종	단위	물 량			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
도로경계석 설치	m	776	242	감) 534.0
아스콘표층공	a	0.1	9.0	증) 8.9
아스팔트 절삭후 덧씌우기	a	305.02	248.62	감) 56.4
차선도색(문자, 기호)	m	443.6	3,651.0	증) 3,207.4
차선도색(백색, 황색, 실선)	m	20,259.0	17,141.0	감) 3,118.0

▢ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	565,056,890	565,056,890	-
도 급 비	246,116,890	254,980,000	증) 8,863,110
관 급 비	282,445,320	265,711,060	감)16,734,260
이 설 비	36,494,680	44,365,830	증) 7,871,150

조 치 계 획

▢ 상기와 같은 내용으로 설계변경 시행하고 공사 준공에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 관련보고서 1부.  끝.