투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2019년 제10차 설계변경자문회의(소위원회) 개최

1. 2019년 제10차 설계변경자문회의(소위원회) 개최와 관련입니다.

2. 아래와 같은 개최계획에 의거 ‘공사감독자’ 및 ‘공사관리관’은 자문자료에 단가결정, 설계자 검토의견, 실정보고서, 발주처의 방침서 등 근거자료를 포함한 자문자료를 작성하여 자문위원에게 사전 배포하여 주시기 바라며, 설계사 및 공사관리관은 반드시 배석하여 주시기 바랍니다. (공사관리관 미배석시 차기 위원회로 이월)

3. 자문위원께서는 협의단가 적용의 타당성, 공법변경의 적정성, 설계변경절차 이행의 타당성 등을 면밀히 사전검토하여 내실있는 자문이 이루어 질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 자문회의 개최 계획

제 목	2019년 제10차 설계변경자문회의(소위원회)
일 시	2019. 8. 22.(목) 14:00
장 소	도시기반시설본부 토목부 12층 회의실
자문위원	위원장 : 토목부 김동현 (토목설계과장) 간 사 : 토목부 차승환 위 원 : 토목부 김동수, 토목부 이성렬 감리단장 서부간선지하도로(1공구) 이정호*************** 감리단장 신림-봉천터널 도로건설공사(1공구) 유기상*************** 감리단장 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 박태선***************
자문안건 (5건)	1. 동부간선도로 확장공사(3공구)	-----------	토목부
	1) 미끄럼방지포장(주행성 확보) 변경		⇒ 감 67,000천원
	2. 강남순환도시고속도로(4공구)건설공사	-----------	토목부
	1) 기존방음벽 철거 및 방음벽 원상 복귀		⇒ 증 205,500천원
	3. 구로고가차도 철거공사	-----------	토목부
	1) 투수블록포장, 경계석설치외 수량 변경		⇒ 증 196,568천원
	4. 양평1유수지 CSOs 저류조 설치사업	-----------	방재시설부
	1) 신설배수로 규격 변경 및 그레이팅 뚜껑 수량 변경		⇒ 증 112,905천원
	2) 운동장 추가번영		⇒ 증 617,193천원

붙임 : 자문요청서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	책임건설사업관리기술자(동부간선도로 확장공사,강남순환도시고속도로4공구 건설공사, 구로고가 철거공사, 양평1유수지 CSOs저류조 설치사업),방재시설부장
주무관	차승환		토목설계과장	김동현		토목부장	08/14 김용제
협조자
시행	토목부-14626	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	chsh155@seoul.go.kr	/	대시민공개