문서번호	설비부-12513
결재일자	2019.8.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
임원성		이종근	08/14 임정규
협조

「동부간선도로확장 1공구 전기공사」

준공기한 연기 및 설계변경 검토 보고

2019. 8.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「동부간선도로확장 1공구 전기공사」

준공기한 연기 및 설계변경 검토 보고

「동부간선도로확장 1공구 전기공사」추진 중 건설사업관리단이 제출한 준공기한 연기(총차) 및 설계변경(3차수) 사항에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사개요

□  공사명: 동부간선도로확장 1공구 전기공사

○ 계약자:*************

○ 공사규모

- 본선구간: 가로등 설치 192본, 터널등 설치 508개 등

○ 건설사업관리단: ㈜도화엔지니어링

□  계약내용

(단위: 원)

구분	계약금액	공사기간	비고
**	***********	*************************
***	**********	**************************	금차

2		검토내용

□  근거

○ 책임건설사업관리단「건선사업전기공사 준공기한 연기(총차) 및 3차공사 설계변경 검토보고」[도화(동부간선)2019-168호(219.8.13.)]

□  변경 내용

○ 계약기간 변경

- 선행공사(토목공사) 공기 연장에 따른 후속공사(전기공사) 공사기간 연기

(토목공사(총차) 준공기한 연기 : ‘19.12.31 → ’21.6.30.)

<변경내용>

구분	변경전	변경후	비고
총차	’08.12.19. ~ ’19.12.31.	’08.12.19. ~ ’21.6.30.
3차	’17.12. 7. ~ ’19. 8. 31.	변경없음

○ 계약금액 변경

- 선행공사(토목공정) 지연으로 3차 공사에 반영된 본선 가로등공사 물량 제외

- 「녹천마을~녹천지하차도간 도로개설공사」구간 보안등공사 반영

<변경내용>

(단위: 원)

구분	변경전	변경후	증·감	비고
**	***********	***********	****
**	**********	**********	************

<3차수 변경물량(총차분 변경없음)>

공사	공종	당초	변경	증감	비고
본선 가로등공사	ST 전선관	17m	-	△17m
	PE 전선관	884m	-	△ 884m
	전력케이블 F-CV 6㎟ 외	3,800m	-	△ 3,800m
	가로등 설치 8~9m	20본	-	△ 20본
	터파기/되메우기	575m	-	△ 575m

□  건설사업관리단 검토의견

○ 동부간선도로확장 1공구 전기공사(3차)는 토목공사 지연으로 본선구간의 가로등공사 작업이 불가하여 ‘천마을~녹천지하차도간 도로개설공사’ 구간 보안등공사만 반영하여 설계변경 하고,

○ 총차 공사기간은 토목공사 공사기간과 같이 준공기한을 연장함이 타당함

3		조치의견

○ 건설관리사업단에서 제출된 준공기한 연기(총차) 및 3차 공사 설계변경 검토 건의 내용이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며,

○ 변경계약 의뢰(총무부) 하고자 함.

붙임: 관련문서 1부.   끝.